함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	물품 변경 계약 체결(광암정수센터 과산화수소 주입설비 제조구매 설치)

1. 기전설비과-8234(2016. 9. 30.)호 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 ‘광암정수센터 과산화수소 주입설비 제조구매 설치 계약’을 아래와 같이 변경하여 계약을 체결하고자 합니다.

가. 계약건명 : 광암정수센터 과산화수소 주입설비 제조구매 설치

나. 계약업체 : ㈜아큐스

다. 계약금액 : 388,318,900원

라. 변경내용 : 계약기간 및 계약금액 변경

구 분	당초	변경	비 고
계약기간	2016.6.4.~ 2016.10.2.	2016.6.4.~ 2016.12.16.
계약금액	388,318,900원	398,700,000원	증)10,381,100원

마. 변경 사유

- 과산화수소 주입설비 설치 전 화학물질관리법에 의거 장외영향평가 완료(11월 중순 예정) 필요하며, 원수에 맛냄새물질 유입으로 공사가 지연됨

- 화학물질관리법 준수 및 과산화수소 휴율적인 투입을 위해 펌프규격(양정) 및 안전밸브 추가 등 변경으로 계약금액 증액 필요

따로붙임 : 변경계약 내역서 각1부. 끝.

주무관	황한범		재무회계과장	박병식		요금관리부장	10/04 박병만
협조자
시행	재무회계과-14291	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1243	/전송	02-3146-1209	/	h2sb@seoul.go.kr	/	부분공개(5)