문서번호	방재시설부-15363
결재일자	2016.10.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		김인숙	10/04 임춘근
협 조
	주무관			윤석채

현장 내 반입자재 소운반 실정보고 검토

2016. 10.

도시기반시설본부

방재시설부

현장 내 반입자재 소운반 실정보고 검토 보고

『경춘선 폐선부지 공원조성공사』 반입자재 현장 내 소운반 실정보고 검토 보고임

▶ 선진경춘(감)2016-654(2016.9.22.)호, 『혼합골재 및 아스콘 소운반에 대한 실정보고』

1		공사개요

○ 공 사 명 : 경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)

○ 위    치 : 노원구 경춘철교 ~ 산업대3길 고가철교

○ 규    모 : 공원조성 연장(L) 1.1km, 면적(A) 53,860㎡

○ 사업기간 : ‘15.10.6 ~ ’17.6.30 (1차수 ‘15.10.6 ~ ’16.10.20)

○ 공 사 비 : 5,445백만원

2		실정보고 내용

○ 자전거도로 포장 자재(혼합골재,아스콘) 반입과 관련하여 자재반입차량(25ton)의

진입 및 회차가 어려운 실정이며,

○ 자전거도로 포장을 위한 혼합골재 및 아스콘 자재 차량이 자전거도로 폭 협소에       따라 시공성이 떨어지므로 자재 임시 적재 후 소운반하여 포장 시행코자 함.

3		수량 및 공사비 검토

공종명	규격	단위	당 초		변 경			증 감		비고
			수 량	공사비	수 량	공사비	수 량		공사비
부대공
1) 혼합골재 소운반	백호0.6㎥ 덤프4.5ton	㎥			420	1,496	증) 420		증) 1,496	운반거리 L=0.21km
2) 아스콘 소운반	백호0.6㎥ 덤프4.5ton	㎥			262	1,300	증) 262		증) 1,300	운반거리 L=0.4km
소 계						2,796			증) 2,796
직접공사비		식				2,796			증) 2,796
제경비		식				1,373			증) 1,373
도급액		식				4,169			증) 4,169

4		건설사업관리기술단 검토의견

○ 자전거도로 포장에 사용되는 자재인 혼합골재, 아스콘 소운반 실정보고 검토결과,     자전거도로 포장 폭 협소로 자재납품 차량(덤프 25ton)의 진입 및 회차가 어려우며

자전거도로의 폭이 2.5m로 시공성이 떨어지므로 일정장소에 하차 후 소운반함이     타당하다고 판단됨.

4		보고자 의견

○ 자전거도로 포장 자재 반입과 관련하여 혼합골재 및 아스콘에 대하여 소운반함이     타당하다고 판단되어 실정보고 승인통보코자 하며, 차후 설계변경에 반영토록     조치코자 함.

붙 임 : 건설사업관리기술단 실정보고 1부.  끝.