문서번호	원수관리과-2372
결재일자	2016.10.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
지방공업사무관대우		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
정번석		손주옥	10/05 박기석
협조	전문관		김대용
	주무관		하수용

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

(유해화학물질 위해관리계획서 작성 용역)

강북아리수정수센터

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

우리 센터에서 시행한『유해화학물질 위해관리계획서 작성 용역』 설계변경 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고드림

□ 개최개요

○ 심의일자 : 2016. 10. 04.(화)

○ 심의장소 : 센터 소회의실

○ 심의안건 : 유해화학물질 장외영향평가 추가에 따른 설계변경

○ 개최사유 : 공종 물량증가에 따른 설계변경

□ 심의대상

○ 용 역 명 : 통합취수장 유해화학물질 위해관리계획서 작성용역

○ 계약기간 : 2016. 9. 7. ~ 2017. 2. 15.

○ 도 급 비 : 24,500,000원

○ 도 급 자 : 한국산업안전관리원(주) 대표 이상용

○ 용역개요 : 장외영향평가 및 위해관리계획서 작성

○ 설계변경

- 변경사유 : 용역 물량 및 도급액 증가

- 변경내용 : 장외영향평가서 작성 추가

‣ 진공조절기까지는 고압가스안전관리법의 적용을 받고, 진공조절기~염소투입기까지는 화학물질관리법의 적용을 받게 되어 화학물질관리법에 의한 영업허가신청을 2016.12.31.까지 하여야 하며, 신청 시 장외영향평가서도 함께 첨부되어야 함

※ 장외영향평가서 법적 제출 기한 : 2017. 12. 31.

- 금액변경 : 낙찰률 91.124%적용

구 분		당 초	변 경	증․감
도급비	용 역 원 가	24,500,000	33,000,000	증8,500,000
	계	24,500,000	33,000,000	8,500,000

- 용역 물량 (상세내역 변경설계내역서 참조)

구 분	공 종	금 액(원)
물량증가	장외영향평가서 작성 직접인건비	3,223,801
물량증가	장외영향평가서 작성 직접경비	356,380
물량증가	장외영향평가서 작성 제경비	3,546,181
물량증가	장외영향평가서 작성 기술료	1,353,996
계	부가세포함	9,328,000
	낙찰률 91.124% 적용 시	8,500,000

□ 심의내용 및 결과

○ 설계변경 적정함 (따로붙임 심의결과서 참조)

□ 조치의견

○ 설계변경 심의결정 내용과 같이 용역수행 중 발생한 물량 증가에 따른 추가사항에 대하여 설계변경하여 계약하고자 함

붙임  1. 설계변경 심의결과서 1부

2. 심의 결정된 변경설계서 1부.

3. 과업지시서(장외영향평가서 내용 추가) 1부.  끝.