문서번호	설비부-15367
결재일자	2016.10.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
신정규		김창균	전결 10/05 권오식
협조

『율곡로 창경궁앞 도로구조개선 전기공사』

실정보고 사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『율곡로 창경궁앞 도로구조개선 전기공사』

실정보고 사항 검토보고

『율곡로 창경궁앞 도로구조개선 전기공사』의 실정보고 사항에 대한 건설사업관리기술자 보고가 있어 검토 보고 드림.

공사개요

□ 건    명 : 율곡로 창경궁앞 도로구조개선 전기공사

□ 계 약 자 : 아람에엔테크(주)

□ 계약기간 : 2014. 5. 15 ～ 2017. 12. 31

□ 계약금액 : 1,160백만원

관련근거

□ 전기공사 실정보고[율곡감2016-220, 2016. 09. 21.]

실정보고 내용

□ 검토내용(종묘측 보도박스 소화기 설치)

구분	변 경 사 항		변경사유
	당 초	변 경
소화기 설 치	터널(차도) : 12개소 보도박스 : 없음	터널(차도) : 12개소 보도박스 : 6개소	- 혜화경찰서 방범시설 강화 권고사항 (생활안전과-3876)

□ 공사비 변경 현황

구 분		공 사 비		증 감
		변경 전	변경 후
전기공사	소화기 설치	6,433,239	9,649,858	증)3,216,619
	제 경 비	2,303,563	3,455,342	증)1,151,779
	합 계	8,736,802	13,105,200	증)4,368,398

건설사업관리기술자 검토의견

□ 소화기 설치

- 보도박스 화재 안전강화를 위하여 보도박스 50m 간격 6개소에 소화기 12EA설치

보고자 의견

□ 건설사업관리기술자의 실정보고가 타당하여 승인하고 추후 설계변경시 반영

붙임   실정보고서 1부.  끝.