서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	서울주택도시공사 사장
(경유)
제목	용역 계약기간 변경 요청(서울형뉴스테이 및 역세권2030주택 대상부지 조사분석 용역)

1. 개발기획부-730(2016.4.18.)호 및 주택정책과-11309(2016.7.7.)호와 관련입니다.

2.“서울형뉴스테이 및 역세권2030주택 대상부지 조사분석 용역”과 관련하여 아래와 같이 계약기간 변경(연장) 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서울형뉴스테이 및 역세권2030주택 대상부지 조사분석 용역

나. 계 약 자 : ㈜도시건축집단아름

다. 계약기간 변경내용

용 역 명	변 경 전		변 경 후		비 고
	계약기간	계약금액	계약기간	계약금액
서울형뉴스테이 및 역세권2030주택 대상부지 조사분석 용역	2016.4.15. ~ 2016.10.14.	50,818,000원	2016.10.14. ~ 2016.11.11.	50,818,000원	- 금액 변경 없음 - 기간 1개월 연장

라. 변경사유 : 현재 추진중인 뉴스테이 및 역세권 2030주택의 효과 등 추가 검토 필요.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	안용태		주택정책팀장	송광남		주택정책과장	10/05 송호재
협조자
시행	주택정책과-17499	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 5층	/
전화	02-2133-7608	/전송	02-2133-0844	/	ayt7879@seoul.go.kr	/	부분공개(5)