서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	관급자재(미끄럼방지-그루빙) 수량 변경 요청

우리과에서 시행중인 한강교량일상유지보수공사(영동대교)에 소요되는 관급자재(미끄럼방지-그루빙) 수량 변경을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 관급자재(미끄럼방지-그루빙) 수량 변경 요청 내역

건명	계약 번호	품명	규 격	단위	수량			수량 변경 사유	비고
					당초	변경	증감
미끄럼방지 포장재(2016한강교량일상유지보수공사-영동대교)	00167019100(계약업체- ㈜ 건융)	미끄럼방지 포장재	F-Pave G, t1.5mm 그루빙	㎡	980	590	(감) 390	-시공물량 감소	계약금액 당초:37,142,000원 변경:22,361,000원 감) 14,781,000원

나. 예산과목 : 교량관리,한강교량관리, 한강교량 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비.

※첨부 : 1. 조달구매계약 변경요청 공문 1부.

2. 미끄럼방지 계약변경 감리 검토서 1부.

3. 수량산출서 1부.

4. 합의각서 1부. 끝.

	교량안전과장
주무관	이제택		강구조교량팀장	류봉현		교량안전과장	10/05 박문희
협조자	★주무관	김윤희		교량관리팀장	유제천
시행	교량안전과-17918	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관1동2층	/
전화	02-2133-1963	/전송	02-2133-1429	/	ljt0706@seoul.go.kr	/	대시민공개