문서번호	도시철도토목부-12415
결재일자	2016.10.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
임경태		윤방식	10/05 김진팔
협조
	주무관		이경훈

『하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사』

동바리 설치를 위한 기초콘크리트 반영 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10

도시기반시설본부

도시철도토목부

『하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사』

동바리 설치를 위한 기초콘크리트 반영 검토 보고

입출고선 교량구간 중 라멘교 상부슬라브 콘크리트 타설을 위한 동바리를 설치와 관련하여 동바리 하부 기초콘크리트(T=15cm)는 타설토록 도면에 반영되어 있으나 수량산출 및 내역서에 누락되어 있어 반영코자 검토 보고함.

※ 레미콘(25-18-8) 물량 : 152㎥, 공사비 : 25,241천원(증)

Ⅰ		관련근거

○ 공사계약일반조건 제6절1항 가목(설계변경) 및 제7절1항 가목(설계변경으로 인한 계약금액 조정)

○ 대한(하남) 제16-497호(2016.9.26.) 실정보고(기초콘르리크 반영)

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사

○ 위    치 : 서울시 강동구 강일동 일원(동광교회~서울시계)

○ 규    모 : 총 연장 1,819m

- 본    선 :   471m (개착박스, 환기구 1개소)

- 입출고선 : 1,348m

○ 도 급 비 : 38,616백만원

○ 공사기간 : '15.03.30 ～ '18.07.26

○ 시 공 사 : 쌍용건설(주)

○ 건설사업관리 : ㈜대한콘설탄트 외 2개사

Ⅲ		건설사업관리단 보고내용

□ 실정보고 내용

○ 입출고선 교량 구간중 강박스 설치구간인 아리수교 구간을 제외한 라멘교 교량구간 L=191.12m)에 교량슬라브 콘크리트 타설을 위한 동바리 설치와 관련하여 동바리 하부 기초콘크리트  반영이 도면에는 있으나 수량 및 내역에 누락되어 있으며,

○ 교량슬라브 콘크리트 타설을 위한 동바리 설치시 하부 바닥면이 토사로써 슬라브 콘크리트 타설시 거푸집 및 콘크리트 자중에 의한 처짐 및 침하가 발생하여 안전 및 품질확보에 어려움이 있어 설계도면에 명시된 바와같이 기초콘크리트를 타설함으로써 공사의 안전성을 확보코져 함

□ 위치도

□ 동바리 기초 계획도

□ 수량 및 공사비 증 · 감 현황

구 분	단위	당 초		변 경		증 감	비고
		수량	금액	수량	금액
콘크리트 타 설	㎥	-	-	152	1,692,824	증) 1,692,824
거푸집설치	㎡			57	908,927	증) 908,927
부대공 (무근콘크리트깨기 및 상차)	㎡	-	-	152	3,623,497	증) 3,623,497
간 접 비					1,584,752	증) 1,584,752
도 급 액 계					7,810,000	증) 7,810,000
지급자재비	㎥			155	8,800,000	증) 8,800,000	관급
폐기물 처리비 및 운반비	ton	-	-	350	8,631,000	증) 8,631,000
총 공 사 비					25,241,000	증)25,241,000

□ 건설사업관리단 검토 의견

○ 교량슬라브 콘크리트 타설을 위한 동바리 설치시 하부 바닥면이 토사로써 슬라브 콘크리트 타설시 거푸집 및 콘크리트 자중에 의한 처짐 및 침하가  발생하여 구조물 안전 및 품질확보에 어려움이 있어,

○ 동바리설치 하부에 강성 기초콘크리트를 타설함으로써 공사의 안전성 및 품질을 확보하기 위하여 동바리 기초  콘크리트를 산정반영하고, 변경되는 공사비에 대해서는 추후 설계에 정산 반영함이 적정한 것으로 판단됨.

Ⅳ		보고자 의견

○ 건설사업관리단에서 제출한 실정보고 검토의견이 적정하다고 판단됨으로 승인조치하고, 추후 설계변경시에 반영코자 함.

붙임 : 건설사업관리단 실정보고서 1식.  끝.