투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	과천시장(건설과장)
(경유)
제목	보상관련 위탁업무 적극 수행 요청(촉구)

1. 토목부-12837(2016.6.23.)호와 관련입니다.

2. 강남순환도시고속도로(8공구)공사에 포함된 과천시 주암동 18-46(구, 골때려 골프)과 주암동 18-44(구, 카오디오)는 「서울특별시와 과천시간 공사·보상업무 위·수탁 협약서(2014.11.19.)」에 따라 건물 내 세입자 이전 조치 등 보상 위탁업무를 적극 수행 요청하였습니다.

3. 귀 시에서 협약서 및 기타 관련법에 따라 조치하여야 할 사항이나 아직까지 보상위탁업무를 적극 수행하지 않고 있어 9월 중에 계획한 매헌지하차도 공사 착수가 지연되어 공정 추진에 지장이 초래되고 있으며, 시공사에서는 본 공사 지연 시 간접비 발생으로 인한 추가 손실을 우리시에 요구할 예정에 있습니다.

4. 본 보상업무 지연으로 인한 공사 지연 손실 부분은 귀 시에서 감수하여야 됨을 알려드리며, 향후 위탁수수료 정산이 원활하게 추진될 수 있도록 보상업무에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	장종환		도시고속도로과장	명경출		토목부장	10/06 김영수
협조자	주무관	김구
시행	토목부-20397	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어 플레이스 빌딩12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8661	/전송	3708-2599	/	hjj0128@seoul.go.kr	/	대시민공개