문서번호	기전과-12384
결재일자	2016.10.6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
이지영		김현기	10/06 최태용
협조
	주무관		김종범

『내구성 향상 보도낮춤 구조개선공사』와 관련

광평교 가로등 이설 전기공사 추진계획

2016. 10.

동부도로사업소

(기전과)

『내구성 향상 보도낮춤 구조개선공사』와 관련

광평교 가로등 이설 전기공사 추진계획

우리사업소 시설보수과에서 시행하는『내구성 향상 보도낮춤 구조개선공사』와 관련 광평교에 위치한 가로등주 원형 8본을 이설하여 공사 수행을 원할히 하고자 함.

1		추진근거

『광평교 내구성 향상을 위한 보도낮춤 구조개선공사 변경계획』

❍ 시설보수과-5567(2016. 8. 2.)

	【 내구성 향상 보도낮춤 구조개선공사 】
세부 사업내용(전기분야) ▸ 사업구간 : 광평교 탄천상류측(수서역→가락시장방향) 보도(B=1.7m,L=325m) ▸ 상류측의 가로등 이설공사 토목공사와 병행 추진

2		도로조명시설관리 이력부(광평교)

가 로 명	광평교(가로등)		설치구간(광평로)			관리번호		222
설치년도	1993.12.31.		송파구 문정동~수서동			접지저항		0.9 [Ω]
시행부서	시행청 : 동부도로교통사업소					절연저항		4~300 [㏁]
시설개요	연 장	326M	등기구종류	시설연장 및 경간				시공자
				326M		20~30M
	노 폭	21.2M	등주형식	배열방식				상호	동아건설 (주)
						맞보기
	등 주 수	30본	총 42등	수 신 기		분 전 반		대표
				1대		1면
	기 꽃 이	30개(매입)	조도 30 lx	광원 종류	형 식		수 량	전화
					MH 250W MH 150W		30등 12등
기 타	보안등 NH 150W 14등 하부등 NH 150W 7등 투광등 NH 150W 6등

3		공사시행계획

공사개요

❍ 공 사 명 : 광평교 가로등 이설 전기공사

❍ 사업구간 : 광평교 탄천상류측(수서역→가락시장방향)

❍ 공사기간 : 착공일로부터 29일

❍ 공사내용

- 가로등 원형 1등용등주 8본(7번~14번) 철거 및 이설 설치

▸ 공사기간에는 다리난간에 임시케이블 이용 가로등(MH250W) 설치

- 전선관 및 케이블 교체 등

▸ 보차도경계석 철거 후 차량방호책 설치시 전선관 설치

소요예산 : 22,000천원(부가세 포함)

예산과목 : 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리, 도로

시설물(교량) 일상유지보수, 시설비 및 부대비(시설비)

4		세부추진계획

계약방법 : 수의계약

❍ 대상업체 : (주)연일전력 대표 최재규,조한철  ☎*************

서울시 송파구 **********************

❍ 근   거 :「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령

제25조 제1항 제5호 의한 소액 수의계약

5		추진일정

2016. 10. 초순    : 공사계약

2016. 10. 중순 ~ : 가로등주 철거 및 임시등주 설치

2016. 10. 하순 ~ : 가로등 기초공사 및 전선관 포설 등

2016.  11. 초순    : 가로등주 설치 및 준공

붙  임 : 1. 설계내역서 1부.

2. 위치도 및 현장사진 1부.

3. 광평교 조명등 현황 1부.  끝.