문서번호	인재기획과-14181
결재일자	2016.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설재무팀장	인재기획과장
장재원	이창희	10/06 원권식
협 조

세종홀, 다산홀 조명 개선 공사 계획

세종홀, 다산홀 조명 개선 공사 계획

2016. 10.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

세종홀, 다산홀 조명 개선 공사 계획

세종홀, 다산홀의 고용량 저효율 광원을 친환경 고효율 LED등으로 교체하여 에너지 절약 및 무대의 조도 개선을 통한 교육 환경 개선하고자 함.

1		추진 근거

□ 서울시 원전하나 줄이기 종합대책(시장방침 143호 ‘12.5.8)

○ 공공부분 LED조명 815천개 교체, 민간부분 700만개 보급 통한 에너지 효율화 개선 추진

□ 공공기간 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2014-95호 11조)

○ 공공기관은 연도별 보급목표에 따라 LED제품으로 교체 또는 설치

□ 서울광원 LED조명 보급활성화 계획 (행정1부시장방침 제77호, ‘14.3.10)

○ 서울광원 연도별 보급 로드맵

구분	2014	2015	2016	2017	2018	비 고
공공부분(%)	30	40	60	80	100

2		경위 및 교체 현황

□ 그간의 추진 경위

○ ‘12년 이전 LED 실내조명등 교체 등수 : 2,806개

○ ‘15년 로즈홀 리모델링 공사(LED등 설치) : 93개

○ ‘15년 인재원 가로등 교체 공사(LED등 교체) : 56개

○ ‘16년 다솜관 리모델링 공사(LED등 교체 및 설치) : 66개

○ ‘16년 청사 LED등 교체 사업(LED등 교체) : 2,580개

- 환경정책과에서 추진시 실내에서 주로 사용되는 일부 등만 교체대상으로 지정하여 간접등 등이 대상 물품에 포함되지 못 하였음.

□ LED등 교체 현황

구분	총 수량(개)	교체율(%)	교체수량(개)	미교체수량(개)	비 고
합 계	6,257	90	5,601	646
실내조명등	6,072	91	5,545	527
옥외등	185	36	66	119

※ 실내조명등 미교체 수량 교체 계획

○ 공사계획에 반영하여 교체

‣ 세종홀 : 다운라이트 24개, 할로겐 4개, 간접등 73개

‣ 다산홀 : 할로겐 18개, 간접등 48개

○ 자체 교체

‣ 배움관 : 할로겐 25개     ‣ 창의관 : 할로겐 35개

○ 추후 예산 확보시 진행

‣ 창의관 : 간접등 300개

3		세부 추진 계획

□ 공 사 명 : 세종홀, 다산홀 조명 개선 공사

□ 공사규모 : 총 198개 교체 및 설치

○ 다운라이트 등기구 교체 : 총 70개

- 메탈 150W → LED 30W 24개, -  LED 15W → LED 15W 24개

- 할로겐 50W → LED 8W 22개

○ 다운라이트 등기구 추가 설치 : LED 30W 7개

○ 간접등 등기구 교체 : 형광등 40W → LED 17W 121개

□ 소요예산 : 24,927천원

○ 공사비 : 10,720천원

○ 관급자재비 : 조달구매(LED15W, 30W, 17W) – 12,207천원,

직접구매(할로겐 대체 LED 8W) – 2,000천원

□ 예산과목

○ 공사비, 조달구매 : 인재양성및시험관리, 교육시설유지및장비확충, 인재원 청사보수․보강, 일반운영비, 시설비

○ 직접 자재 구매 : 인재양성및시험관리, 교육시설유지및장비확충, 인재원청사 유지관리, 일반운영비, 시설비

□ 계약방법

○ 공사비가 소액으로 전문 전기공사 업체와 소액 수의 계약

○ LED 등기구는 조달 구매(단. 할로겐 대체 LED 8W 직접 구매)

□ 세부추진내용

○ 발주 및 계약 : ‘16.10.5. ~ 10.14

○ 공사 시행 : ‘16.10.17. ~ 10.31.

4		기대효과

□ 정부․서울시책 사업에 적극 동참

□ 강당의 조도를 개선하여 교육 환경 개선

□ 고용량 광원을 저전력 소비 LED조명등으로 교체하여 전력 절감 및 온실배출가스 감축.

	교체 전	교체 후	절감액
사용량/년간 (일 평균 4시간 사용)	14,608kwh	4,746kwh	9,862kwh
전기요금/년간 (kwh당 120원)	1,752,960원	569,520원	1,183,440원

붙 임 : 1. 세종홀, 다산홀 조명등 교체 도면  3부.  끝.