투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(개포디지털혁신파크 옥상녹화·텃밭조성 사업)

1. 시설과-5444(2016.10.7)호의 관련입니다.

2. 우리사업소에서 추진 중인 「개포디지털혁신파크 옥상녹화·텃밭조성 사업」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 개포디지털혁신파크 옥상녹화·텃밭조성 사업

나. 공사기간 : 2016. 7. 26 ~ 2016. 10. 13

다. 도 급 액 : 148,467,870원

라. 도 급 자 : 대조종합건설(주) 대표 임홍순

마. 준공기한 연기

- 당초 : 2016. 7. 26 ~ 2016. 10. 13

- 변경 : 2016. 7. 26 ~ 2016. 10. 20

바. 연기사유 : 옥상 태양광 발전시설 기초설치 지연으로 인한 후속공정 지연

사. 지체상금 부과검토

- 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

붙  임 : 준공기한연기 검토보고서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	최종성		시설팀장	임록화		시설과장	10/07 진병규
협조자
시행	시설과-5449	(		)	접수		(		)
우	07062	서울 동작구 여의대방로20길 33 동부공원녹지사업소 시설과	/
전화	02-2181-1161	/전송	02-2181-1169	/	jongsung79@seoul.go.kr	/	대시민공개