투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기의뢰(개포디지털혁신파크 옥상녹화·텃밭조성 사업)

1. 시설과-5444(2016.10.7.)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 추진중인 『개포디지털혁신파크 옥상녹화·텃밭조성 사업』에 소요되는 관급자재의 납품기한을 아래와 같이 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 개포디지털혁신파크 옥상녹화·텃밭조성 사업 관급자재 구매

나. 관급자재 현황

품 명	계약번호	규 격	단위	수량	계약자	비 고
감국	22217281	8cm POT	본	270	영농조합법인 지랜드
구절초	22217279	8cm POT	본	280	영농조합법인 지랜드
금계국	22217248	8cm POT	본	190	영농조합법인 지랜드
기린초	22217242	8cm POT	본	480	영농조합법인 지랜드
꽃범의꼬리	22217264	8cm POT	본	325	영농조합법인 지랜드
꽃잔디	22217231	8cm POT	본	355	영농조합법인 지랜드
꿩의비름	22217270	8cm POT	본	280	영농조합법인 지랜드
노루오줌	22217256	8cm POT	본	325	영농조합법인 지랜드
도라지	22217257	8cm POT	본	200	영농조합법인 지랜드
돌단풍	22217235	8cm POT	본	280	영농조합법인 지랜드
두메부추	22217272	8cm POT	본	360	영농조합법인 지랜드
맥문동	22217297	3~5분얼	본	475	영농조합법인 지랜드
백리향	22217213	10cm POT	본	330	영농조합법인 지랜드
범부채	22217258	8cm POT	본	160	영농조합법인 지랜드
부처꽃	22217259	8cm POT	본	660	영농조합법인 지랜드
비비추	22217290	2~3분얼	본	135	영농조합법인 지랜드
사계잔디패랭이	22217232	8cm POT	본	380	영농조합법인 지랜드
상록패랭이	22217239	8cm POT	본	205	영농조합법인 지랜드
샤스타데이지	22217294	3~5분얼	본	310	영농조합법인 지랜드
쑥부쟁이	22217269	8cm POT	본	135	영농조합법인 지랜드
아스타	22217278	8cm POT	본	385	영농조합법인 지랜드
억새	22217229	8cm POT	본	55	영농조합법인 지랜드
원추리	22246403	2~3분얼	본	140	영농조합법인 지랜드
후룩스	22246406	8cm POT	본	130	영농조합법인 지랜드
사계덩굴장미 (안젤라)	22438349	2년생,2~3가지	주	186	현대장미원

다. 납품기한 변경

- 당 초 : 2016. 10. 11

- 변 경 : 2016. 10. 19

라. 소요예산 : 4,945,450원(변경없음)

마. 연기사유 : 선행공정 지연으로 납품기한을 본 공사 일정에 맞추어 납품기한 연기

바. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 동부공원녹지사업소

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙  임 : 준공기한 연기 검토 보고. 1부.  끝.

	시설과장
주무관	최종성		시설팀장	임록화		시설과장	10/07 진병규
협조자
시행	시설과-5448	(		)	접수		(		)
우	07062	서울 동작구 여의대방로20길 33 동부공원녹지사업소 시설과	/
전화	02-2181-1161	/전송	02-2181-1169	/	jongsung79@seoul.go.kr	/	대시민공개