함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신자	행정관리과장
(경유)
제 목	설계변경 계약의뢰(취수장 통합차단막 철거 및 설치공사)

우리 정수센터에서 시행중인 『취수장 통합차단막 철거 및 설치공사』에 대하여 설계변경 사유가 발생되어 아래와 같이 변경계약 의뢰합니다.

가. 공 사 명 : 취수장 통합차단막 철거 및 설치공사

나. 계약업체 : (주)합동종합건설  대표 김춘옥

다. 공사기간 : 2016. 06. 16 ~ 10. 31

라. 계약금액

- 당 초 : 금일천팔백이십팔만원(\18,280,000원)

- 변 경 : 금일천팔백팔십팔만칠천원(\18,887,000원)

마. 변경사유 : 시공물량 증 및 보험료 정산에 따른 제잡비 설계변경

바. 예산과목 : 상수도사업비,영업비,원수 및 취수비,수선유지교체비,기타교체비

따로붙임 : 1) 풍납취수장 통합차단막 설치 관련 보고서 1부.

2) 설계변경 내역서 1부.

3) 설계변경 심의위원회 개최 결과보고  1부.

4) 설계변경 합의서 1부.

5) 제비율검증 확인서 1부. 끝

	정수시설과장
주무관	박응희		정수시설과장	10/07 유영춘
협조자
시행	정수시설과-10618	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11	/
전화	3146-5678	/전송	3146-5691	/	ritz2891@seoul.go.kr	/	대시민공개