문서번호	시설과-5444
결재일자	2016.10.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
최종성	임록화	진병규	10/07 이춘희
협 조

「개포디지털혁신파크 옥상녹화·텃밭조성 사업」

준공기한 연기 검토 보고

2016. 10

동부공원녹지사업소

(시설과)

「개포디지털혁신파크 옥상녹화·텃밭조성 사업」

준공기한 연기 검토 보고

우리사업소에서 추진 중인「개포디지털혁신파크 옥상녹화·텃밭조성 사업」관련하여 도급사로부터 준공기한 연기요청이 있어 아래와 같이 검토보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 개포디지털혁신파크 옥상녹화·텃밭조성 사업

○ 공사내용 : 식재기반, 수목식재, 휴게시설설치, 데크공사 등

○ 공사기간 : 2016. 07. 26 ~ 10. 13

○ 총공사비 : 금195,458,450원(일억구천오백사십오만팔천사백오십원)

도급액 : 금148,467,870원/ 관급자재 46,990,580원

○ 도 급 자 : 대조종합건설㈜ 대표 임홍순

□ 검토내용

○ 연기사유

- 옥상 태양광 발전시설 기초설치 지연으로 인한 후속 공정 지연

○ 준공기한 변경

- 당초 : 2016.7.26. ~ 2016.10.13

- 변경 : 2016.7.26. ~ 2016.10.20

○ 지체상금 부가 검토

- 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 실정사항

- 태양광 발전시설 기초설치 지연으로 후속 공정인 관급자재(식생) 납품기한을 본 공사 일정에 맞추어 납품연기

□ 처리의견

○ 도급사로부터 제출된 준공기한 연기사유가 타당하므로 계약부서에          준공기한 연기 및 관급자재(식생) 납품연기를 요청하고자 함.

붙임 : 준공기한 연기요청 공문 1부. 끝.