문서번호	전산정보과-11118
결재일자	2016.10.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	전산정보과장	요금관리부장		상수도사업본부부본부장
장병균	홍동섭	박병만		10/10 정중곤
협 조
	계측관리과장		김영목

『PDA활용 계량기교체시스템 구축 사업』

준공검사 계획

2016.10

요금관리부

(전산정보과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

『PDA활용 계량기교체시스템 구축 사업』

준공검사 계획

『PDA활용 계량기교체시스템 구축 사업』이 완료되어 과업

내용의 이행여부 및 요구사항의 구현 등에 대한 준공검사를

실시하여 향후 시스템의 운영에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		현 황

□ 사업개요

○ 사업기간 : ‘16. 5. 3 ∼ 9. 30

○ 사 업 비 : 201,630,000원

○ 계약업체 : ㈜다나와컴퓨터 컨소시엄

○ 사업내용

- PDA활용 계량기교체시스템(S/W) 개발 1식

- 모바일 기기(PDA) 구입 95대

□ 추진경위

○ PDA활용 계량기교체시스템 구축 발주계획 수립 : ‘16. 2. 1

○ PDA활용 계량기교체시스템 구축 계약체결 : ‘16. 5. 3

○ 현업사용자 인터뷰 실시 : ‘16. 5.11 ∼ 5.13

○ 고객지원시스템, 자재관리시스템 등 연계관련 업무협의       :  ‘16. 6. 16, ’16. 7. 20

○ 계측관리과 담당자와 업무협의 : ‘16. 6.23, ‘16. 7. 19

○ 시스템 개발 : ‘16. 6. 27 ∼ 9. 30

○ 통합 테스트 : ‘16. 9. 21 ∼ 9. 30

Ⅱ		과업내용

□ 프로그램 개발

○ PDA용 프로그램

- 계량기교체 작업현장에서 PDA를 활용하여 업무지시사항과

교체관련 최신정보(계량기위치,기물번호등)를 습득

- 교체결과내용(철거/폐전지침등)을 현장에서 PDA 입력 후 실시간으로

Arisu인포시스템과 대행업무지원시스템으로 전송

○ 대행업무지원시스템내 교체용 프로그램

- Arisu인포시스템에서 전송보내온 교체대상 계량기정보와 업무연락 내용 확인

- 교체원이 교체현장에서 PDA로 입력한 내용 확인 및 승인처리 후

Arisu인포시스템으로 실시간 전송

- 교체업무에 필요한 현황 관리 : 교체원 정보, PDA기기 정보 등

○ 타 행정시스템 연계

- Arisu인포시스템 : 수용가 및 교체현황, 교체원등의 정보, 업무

연락사항 결과확인, 교체유형별 집계정보 등 조회

- 고객지원시스템 : 수도계량기교체 민원사항 연계처리

- 자재관리시스템 : 계량기 기물번호, 계량기 구경, 계량기 형식 등 조회

- PDA검침시스템 : 계량기 위치(이미지) 정보 조회

□ PDA 및 보안모듈라이선스 구매

○ PDA 기기 구매 : 95대

○ 보안모듈라이선스 : 정보자료 온라인 송수신을 위한 네트워크

보안승인용 소프트웨어(VPN 클라이언트) 95개

Ⅲ		준공검사 계획

○ 기  간 : ‘16.10.10(1일간)

※ 사전 현장검수 정상 작동 확인 완료 : ‘16.9.29 ～ 10.7

○ 대  상 : PDA활용 계량기교체시스템 구축관련 주요 과업내용

○ 검사자 : 교체시스템 관련 업무 담당(계측관리과, 전산정보과)

○ 검사방법 : 붙임 “ 준공검사점검표”에 의한 검사

○ 검수시 고려사항

- 사업 관리

· 계약서 및 과업내용서의 기준에 적합여부 점검

· 산출물(문서)의 적합 여부 점검

- 과업 내용

· 과업내용서 이행여부 점검

· 구현된 기능에 대한 성능점검

· 시스템 일관성 유지를 위한 표준화 적합성 여부

- 사용자 테스트 결과

· 요구사항 반영 여부

Ⅳ		향후계획

○ 준공검수 결과보고  : ’16.10.11

○ 준공처리           : ’16.10.12

붙 임 : 준공검사점검표 1부.