문서번호	도시철도설비부-11022
결재일자	2016.10.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
박철호		이명수	10/10 정찬웅
협조
	설비공사과장		황영일

우이-신설 도시철도 민간투자사업

기계분야 제9차 공정회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서울특별시도시기반시설본부

(도시철도설비부)

우이-신설 도시철도 민간투자사업

기계분야 제9차 공정회의 결과보고

우이-신설 도시철도 민간투자사업의 원할한 사업추진 및 공정관리 확인을 위한 기계분야 공정회의 개최 결과를 보고 드림.

□ 회의개요

○ 일  시 : 2016. 10. 06.(목)  15:30~ 17:30

○ 장  소 : 우이3공구 감리단상황실

○ 참석자 : 12명

- 본  부 : 설비계획과장. 분야별공사관리관 4명

- 외  부 : 각 공구별 감리원 3명, 시공사(현대로템) 4명

□ 보고현황

○ 보고방법 : 회의자료에 의거 각 공구 감리원이 보고

○ 보고내용

- 각 공구별 공정 추진현황

- 승강장안전문 추진현황

- 승강설비(E/V, E/S) 추진현황

- 기타 건의사항 등

□ 회의결과

○ 기계분야 추진일정에 따라 정상 추진 중이며, 2017.03월까지 모든 공정 완료 예정

○ 승강장안전문

- 결로로 인한 일부정거장 개별제어반 불량 → 10월10일까지 교체예정

- 신호분야와의 협의 일정에 따라 정거장별 연차적 차량 연동시험 실시

○ 승강설비

- 1공구의 경우 건축분야 공정지연으로 후속공정 추진에 어려움이 있음

- 3공구의 경우 토목 구조물 지연으로 17년3월 완성검사가 어려운 실정 임

○ 기타 사항

- 종합관리동 도시가스 검사완료 후 10월17일이후부터 설비 시운전 예정

□ 협조 및 지시사항

○ 우이~신설은 2017.7.29. 개통을 목표로 추진 중이니 승강설비를 포함한 모든 공정은 2017.3.20.일 이전에 완료되어야 함

- 지연 공정에 대하여는 타분야와 긴밀한 협조로 준공에 지장을 초래하지 않도록 공정관리에 철저를 기하여 주기 바람.

- 외부출입구 구조물공사 지연에 따라 도면에 의해 승강설비를 제작할 경우 문서로 관련 분야의 책임 소재를 명확히 하기 바람

○ 시운전은 차량 및 신호 시운전이 주공정이므로 승강장안전문 연동 시운전은 신호 시운전 일정에 맟춰주기 바람

○ 타 현장에서 안전사고가 종종 발생하고 있음. 안전은 현장의 최우선 가치임을 명심하고 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바람.

□ 향후계획

○ 2017.11. 3. (목) 제10차 기계분야 공정회의 실시

붙임: 1. 각 공구별 공정회의 자료 각1부.

2. 승강장안전문 추진현황 1부.

3. 공정회의 참석부 1부.

4. 공정회의 진행 사진 1부.  끝.