보  고  서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	이상욱	이경희	10/10 최철민

제 목 : 유수장애 상수도관 처리결과

=============================================================

명에 의하여 관악구 봉천동 지역의 유수장애 상수도관과 관련하여 처리결과를 아래와 같이 보고드림

□ 유수장애 상수도관 대상 현황

○ 2016년도 유수장애 정비대상 현황

구 분	대상	실적	잔여량	추진율
봉천동 지역	113	52	61	46%

□ 처리결과 내용

○ 잔여량 총괄표

잔여량 계	유수장애 대상제외 (재개발 지역)	유수장애 대상제외 (유수흐름 지장없음)	유수장애 대상제외 (장기관리 대상)	추진 중
61	30	4	9	18

○ 재개발 사업구역 유수장애 대상제외 (30개소)

- 사유 : 봉천동지역 재개발사업 구역내 공공시설물은 향후 철거예정이므로 장기관리대상으로 지정하여 2016년 유수장애 상수도관 정비대상에서 제외코자 함

- 재개발 사업추진 현황(붙임참고)

․ 사 업 명 : 봉천 4-1-2구역 및 봉천 4-1-3구역 재개발

․ 위    치 : 관악구 성현동 산 101번지 및 480번지 일대

․ 추진현황 : 서울시 건축․교통 통합심의완료 후 사업시행인가 진행 중임

․ 향후예정 : 사업시행인가 후 사업자선정 및 사업시행

- 유수장애 제외대상 : **********외 29개소

○ 유수흐름 지장 없는 대상제외 (4개소)

- 사유 : 하수박스 내부에 상부 슬라브에 위치하고 있어 유수에 지장없는 대상

※ 하수박스의 경우 단면적의 90%까지 시설용량이므로 상수도관이 상부스라브에 위치하여 90% 외에 해당되므로 유수에 지장없음

- 유수장애 제외대상 : ***********외 3개소

○ 상수도관경 D=200mm이상의 장기관리 대상제외 (9개소)

- 사유 : 상수도이설 시 대규모 단수 수반에 따른 단기적 어려움으로 인하여 장기관리하는 대상

- 유수장애 제외대상 : ************(D=600mm)외 8개소

○ 유수장애 이설 진행 대상 (18개소)

- 사유 : D=20~150mm로 하수흐름에 장애를 주는 상수도관

- 유수장애 제외대상 : ***********외 17개소

․ 10말까지 완료예정 : 7개소

․ 11말까지 완료예정 : 11개소

□ 향후계획

○ 상기 유수장애 대상제외 43개소에 대하여 ‘2016년 유수장애 대상제외’코자 하며 관악구청 치수과에 통보

○ 추진중에 있는 18건에 대하여 11월말까지 조속히 처리코자 함

※ <16.10.10.> 대상제외 시 2016년도 유수장애 정비대상 현황

구 분	대상	실적	잔여량	추진율
봉천동 지역	113	95	18	84%

붙임 : 1. 정비대상리스트 1부.

2. 재개발 사업 현황 1부.  끝.