문서번호	교통운영과-19201
결재일자	2016.10.10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		신호운영팀장	교통운영과장
강민우		고광섭	10/10 강진동
협조
	실무사무관		정판식

계약금액 변경보고

교통신호제어용 차량검지기 유지보수 공사

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.10.

계약금액 변경보고

교통신호제어용 차량검지기 유지보수 공사

2016년 교통신호제어용 차량검지기 유지보수 공사(연간단가) 계약금액 변경사유가 발생되어 아래와 같이 보고 드림.

□ 공사개요

○ 사 업 명 : 교통신호제어용 차량검지기 유지보수 공사(연간단가)

○ 계 약 자 : ㈜신한네오텍 대표 강미순

○ 공사기간 : 2016.02.19.∼2016.12.31.

○ 계약금액 : 금223,231,600원

○ 예산과목 : 교통운영과, 도심교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물관리,

교통신호제어용 차량검지기 신설 및 보수, 시설비(401-01)

○ 계약번호 : 20160*******00

□ 관련근거

○ 앞막힘 예방 신호 및 좌회전 감응 확대를 위한 검지기설치 요청

- [서울특별시지방경찰청 교통관리과-15411(2016.06.03.)]

- [서울특별시지방경찰청 교통관리과-15314(2016.06.03.)]

○ 교통신호제어용 차량검지기 유지보수(연간단가)공사 예산잔액 사용보고

[교통운영과-18949(2016.10.06.)]

○ 교통신호제어용 차량검지기 신설(본공사3차) 작업지시

[교통운영과-16899(2016.09.05.)]

○ 교통신호제어용 차량검지기 원인자공사 2차 시행보고

[교통운영과-18515(2016.09.30.)]

□ 변경사유

○ 앞막힘 예방신호 및 좌회전 감응확대로 교통신호제어용 차량검지기 물량증가

○ 각종 공사로 훼손된 교통신호제어용 차량검지기 기능회복을 위하여, 원인자로부터

수납된 공사비(세입세출외현금) 집행을 위한 물량증가

□ 변경내용

구 분	예산액 (원)	계약금액 당 초(원)	계약금액 변 경(원)	계약금액 증⦁감(원)
금 액	253,514,000	223,231,600	299,075,000	증 75,843,400

□ 세부내용

구 분	차 수	금 액(원)	비 고
본 공사	1차 (2개소)	9,320,000	지출완료
	2차 (19개소, 좌회전감응)	66,620,000	지출완료
	3차 (10개소, 앞막힘)	147,291,600	집행잔액
		30,282,400	예산잔액
	소 계	253,514,000
원인자공사	1차 (2개소)	11,861,000	지출완료
	2차 (6개소)	33,700,000	예상금액
	소 계	45,561,000
합 계		299,075,000

□ 예산확보

○ 앞막힘 예방신호 및 좌회전 감응확대로 2016년 교통신호제어용 차량검지기

예산잔액 활용

○ 교통신호제어용 차량검지기 훼손에 따른 원인자로부터 수납된 예산

□ 향후계획

○ 2016년 교통신호제어용 차량검지기 계약금액 변경의뢰(재무과)

○ 신속한 기능회복을 위하여 2016년 교통신호제어용 차량검지기 유지보수(연간단가)

계약업체로 하여금 공사시행

붙임 :  1. 교량신호제어용 차량검지기 변경 설계내역서 1부

2. 2016년 교통신호운영사업 추진계획 1부

3. 관련보고서 1부.  끝.