급수공사 공사기간 연기 보고서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	고태우	김찬모	10/11 박길영

	명에 의하여 『2016년 천연동외 13개동 상수도공사』시행중 아래와 같은 사항이 발생하여 보고합니다.
2016. 10.
보 고 자 : 직 지방시설서기보 성명 : 고태우

복 명 내 용
건 명	공사기간 연기 보고서(***************)
내용	1. 공사위치 : 서울시 *************** 2. 작업지시번호 : 개량-66 3. 급수공사 종별 : 개량 4. 보고 내용 - 상기 위치에 급수공사를 작업지시 하였으나, 우천으로 인해 취소되어 추후 교통 재협의 후 작업시행예정 5. 조치의견 - 상기 위치의 급수공사 공사기간을 아래와 같이 연기하여 공사시행에 만전 을 기하고자 합니다. ◆ 당초 공사기간 : 2016. 09. 05. ～ 2016. 10. 10. 변경 공사기간 : 2016. 09. 05. ～ 2016. 10. 31. 6. 지체상금 부과여부 : 미부과
비 고

끝.