문서번호	녹지관리과-9630
결재일자	2016.10.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	녹지관리과장
안순호	박병구	10/11 김윤철
협 조

2016 녹색자금 나눔숲 조성사업 -관급자재 변경 계획

2016. 10.

2016년 녹색자금나눔숲 조성사업

관급 자재 변경 계획

「녹색자금 나눔숲 조성공사」와 관련하여 원할한 공급을 위해 관급자재를 변경 조정하고자 아래와 같이 검토 하고 보고 드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2016 녹색자금 복지시설 나눔숲 조성사업

○ 대 상 지 : 송죽원, 효정비전타운

○ 공사기간 : 2016. 8. 26~ 2016. 11. 8

○ 도 급 액 :  94,811천원

○ 도 급 자 :  정나라 건설(주)

□ 관급자재 변경 내역

≪송죽원≫

▸ 고무매트 조달업체 변경 및 물량 증가(사유)

- 당초 납품 예정업체 조달 계약 등록이 만료되어, 납품이 불가하여 적기에 공사를 완료하고자 동일규격 타 조달물품으로 변

경 하고자 함.

- 당초 놀이시설(조합놀이대) 바닥에 포장된 고무매트 일부만(23.3㎡)교체하게 되어 있으나 노후화로 인하여 바닥면이 고르지 않아 안전사고 위험이 있어 전체면적(39㎡)을 교체하는 것이 타당함.

≪효정비전타운≫

▸ 황토포장, 데크로드 물량 증감(사유)

- 경사로 인한 단차와 조경석 쌓기 작업 등으로 인한 휠체어 보행로 확보 어려움 및 휴게 시설과 불연계로 인한 장애인 이용 불편 해소을 위해 황토 포장 물량 줄이고, 데크로드 증액 함.

구 분	변 경 사 항
관급자재	○ 고무매트 - 당초(㎡단가) 42,000원 ⇒ 변경 42,000원 ○ 수량 및 금액 - 당초 : 23.3㎡⇒ 978,600원 - 변경 : 49㎡ ⇒ 2,058,000원(증1,079,400원)
	○ 황토포장 - 단가(㎡) : 25,000원 ○ 수량 및 금액 - 당초 : 265.04㎡⇒ 6,626,000원 - 변경 : 254.54㎡ ⇒ 6,363,500원(감262,500원)
	○ 데크로드 - 단가(㎡) : 90,000원 ○ 수량 및 금액 - 당초 : 63.91㎡ ⇒ 5,751,900 - 변경 : 85.8㎡ ⇒ 7,722,000원(증1,970,100원)

□ 보고자 의견

○ 상기와 같이 실정에 맞게 관급 자재를 변경 조정 하고자 함.