문서번호	도로보수과-4924
보존기간	년
결재일자	2016.10.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
하승환		이상호	10/11 이종엽
협 조

『2016년 굴착복구 시행도로정비공사』

집행잔액 사용 및 추가 공사 계획

2016. 10.   .

성동도로사업소

도로보수과

『2016년 굴착복구 시행도로정비공사』

집행잔액(낙찰차액 포함) 사용 및 추가 공사 계획

「2016년 굴착복구 시행도로 정비공사」예산 재배정액(1,436백만원) 중 도급공사 및 관급자재(총액구매) 낙찰차액(147백만원)이 발생하여 추가 포장 시행에 대하여 보고드림.

□ 예산현황                                         (단위 : 백만원)

계	도급비	관급비	이전비	낙찰잔액	비고
1,436	329	555	405	147

※ 예산과목 : 도로시설물관리, 도로굴착복구(도로굴착복구기금), 도로굴착복구공사, 시설비

□ 보고내용

○ 도급공사 및 관급자재 낙찰잔액이 상기와 같이 발생되어 포장적기에 낙찰잔액 사용 추가 포장을 시행코자 함

○ 추가 포장공사 예정 구간

․ 제기로(고대앞사거리 → 제기1교) : A=8.99a

․ 광나루로(올림픽대교북단→올림픽대교북단사거리) : A=14.25a

․ 광나루로(올림픽대교북단사거리→올림픽대교북단) : A=14.25a

․ 광나루로(화양사거리→화양삼거리) : A=8a

계 : 제기로외 3개구간 A=45.49a

□ 행정사항

○ 상기 보고내용과 같이 추가구간에 대하여 우선 포장을 실시하고 추후 정산설계변경시 시공물량을 반영하여 정산처리코자 함

첨  부 :  2016년 굴착복구 시행도로 정비공사 추가물량. 끝.