문서번호	급수운영과-23392
결재일자	2016.10.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		남부수도사업소장
정헌석	이경희	최철민		10/11 전영석
협 조
	시설관리과장		천성훈

공정보고회(10월) 개최결과 보고

2016. 10. 10.

남부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

공정보고회(10월) 개최결과 보고

우리 사업소에서 시행 중인 배급수(송배수)관정비공사에 대한 10월 공정보고회 개최결과를 보고 드림.

1		보고회 개요

□ 일 시 : 2016. 10. 10.(월) 16:00

□ 장 소 : 사업소 2층 회의실

□ 대상사업

○ 독산로~시흥대로간 송배수관정비공사 외 5건

□ 참석자(22명)

○ 사 업 소(13) : 행정지원과장, 급수운영과장, 시설관리과장
(※ 사업별 공사 업무담당자 배석)

○ 시설공단(3) : 팀장 박태문 외 2명

○ 현장관계자(6) : 세웅인포션 현장대리인 이정구 외 5명

□ 회의안건

○ 사업 추진실적 보고 및 부진사항에 대한 대책 마련

○ 철저한 공사장 안전관리 구축

○ 상호 신뢰구축을 통한 청렴문화 정착 조성 등

2		공정현황

(’16. 9. 30. 기준)

연번	공 사 명	공사기간	사업비 (백만원)	공사개요		추진현황 (m)	공정률
				구경 (mm)	연장 (m)		계획	실공정
계	계	-	10,622	400~ 800	10,976	6,145	66%	56%
1	독산로~시흥대로간 송배수관정비공사(APC)	2016.7.25.~12.21.	800	600	400	작업구 7개소중 6개소설치	38%	30%
2	여의도동 5-2구간외 1개소 송배수관정비공사(개착)	2016.5.16.~11.28.	700	400	400	465	87%	89%
3	독산동 378-242번지외 6개소 배급수관 정비공사	2016.5.4.~12.27.	1,722	80 ~300	2,560	1,197	62%	48%
4	행운동63-19~63-43번지외 9개소 배급수관 정비공사	2016.4.29.~12.16.	1,500	100 ~200	2,120	950	60%	48%
5	신대방동685-3～644-1번지외 5개소 배급수관 정비공사	2016.5.10.~12.24	3,200	100 ~300	2,375	1,590	75%	67%
6	여의도동24-3～26-4번지외 7개소 배급수관 정비공사	2016.5.11.~12.23.	2,700	200 ~300	3,121	1,936	77%	77%

3		주요 지시사항

□

공사관리

○ 전반적인 공정보고회 자료가 부실하므로 세부계획서 작성 재 보고

- 공기내 공사가 마무리 될 수 있도록 구체적인 계획서 작성 필요

○ 기존관 철거 실적 증대를 위한 적극적인 관리 대책 추진

- 신관 부설 중 발견되는 모든 폐상수도관은 적극 철거 조치 등

○ 공사 중 민원이 유발되지 않도록 세심한 관리 필요

- 단수시간 준수 등 공사로 인한 주민 불편이 없도록 사전 조치 철저

- 민원 발생시 철저한 초동대처로 민원이 확대되지 않도록 관리 철저

○ “여의도동 송배수관 정비공사”의 공원 녹지대 구간에 대해서는 기존관

충진에 대해 타당성 검토

□

공사장 안전관리

○ 공사현장 보행자 통행로 확보 및 안전시설 확보 철저

○ 각종 장비 사용 등으로 인한 작업자 안전사고 예방 철저

○ 되메우기 불량으로 인한 도로 침하(동공) 발생이 없도록 시공관리 철저

〔행정지원과장 당부사항〕

안전한 공사장 관리를 위해 사람이 우선이다는 생각과 항상 원칙에

기본을 두고 공사관리에 임하여 주기 바람

□

청렴도 향상

○ 다양한 소통채널 확보로 현장 불만 해결 및 상호 청렴성 제고

○ 청렴문화 확산을 위해 불필요한 오해의 소지가 없도록 직무수행

□

행정사항

○ 계획대비 부진공정 사업에 대하여는 장비 및 인력투입 계획을 포함한 공정만회 대책을 구체적으로(주 단위) 작성하여 제출지시

(제출자 시설관리공단 ‘16.10.17한)

4		향후계획

□ 10월 공정보고회 개최결과 통보

○ 공정보고 회의내용을 시설관리공단에 통보 보완토록 조치

□ 11월 공정보고회 개최

○ 2016.11.1.(화) / 사업소 2층 회의실.  끝.