문서번호	기전설비과-8461
결재일자	2016.10.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
이상록		서대훈	10/11 구자훈
협조

- 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 -

슬러지수집기 납품기한 연장 계획 보고

2016. 10.

상수도사업본부

【생산부】

- 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 -

슬러지수집기 납품기한 연장 계획 보고

우리 본부에서 추진중인「뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사」의 농축조 구조물 설치 지연으로 후속 공정인「슬러지수집기 제작구매설치」건의 납품기한을 연장하고자 함

□ 현   황

◯ 사 업 명 : 뚝도정수센터 농축조 슬러지수집기 제작구매설치

◯ 사업개요

- 중심구동형 슬러지수집기 설치 31m × 2대,  35m × 2대

◯ 계 약 자 : 주식회사 테에스엔텍 (대표 : 곽병섭)

◯ 계약금액 : 금922,690,000원

◯ 계약기간 : 2016.03.16.~2016.10.12.

□ 변경내용 및 사유

◯ 토목공사의 지연으로 슬러지수집기 설치가 불가함.

- 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 준공기한 연기(생산관리과-12283)

◯ 슬러지수집기의 납품기한을 토목공사 후 설치 가능시점까지 연장 필요

- 31m×2대 : 2016.10월 중 설치,  35m×2대 : 2017년 상반기 설치예정

◯ 계약기간  당초 : 2016.03.16.~2016.10.12.

변경 : 2016.03.16.~2017.06.30.(261일 증)

□ 행정사항

◯ 재무회계과에 관련사항 통보, 계약사항 변경

◯ 귀책소재 : 우리 본부(선행사업 지연)

◯ 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.