함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 체결 보고[수유6배수지 건설공사 지반조사 용역]

1. 시설과-8723(2016.10.17)호와 관련입니다.

2. 『수유6배수지 건설공사 지반조사 용역』에 대한 변경계약을 아래와 같이 체결하고자 합니다.

가. 계 약 자 :***************: 정점래

나. 용역개요

1) 지반조사 시추 2공

2) 실내시험 1식, 내진시험 1식

다. 계약기간 : 2016.05.20. ∼2016.10.16.

라. 변경계약 현황                                    (단위 : 원)

구 분	당 초		변 경		비 고
	용역기간	계약금액	용역기간	계약금액
계약기간	‘16.05.20.∼ ’16.10.16.	15,309,500	‘16.05.20.∼ ’16.12.15.	15,309,500	기간연장

마. 변경사유

1) 수유6배수지 건설부지 선정 지연에 따른 지반조사 시추 관련 협의

2) 실내시험 실시 시험결과 분석을 위한 추가 소요기간 필요

붙임 : 1. 합의서 1부.

2. 변경계약 방침 보고서(부본부장) 1부.

3. 변경계약 의뢰 관련공문 1부. 끝.

주무관	김경식		재무회계과장	박병식		요금관리부장	10/11 박병만
협조자
시행	재무회계과-14718	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1231	/전송	02-3146-1209	/		/	부분공개(7)