함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	재무회계과장
(경유)
제 목	계약사항 변경(납품기한) 요청

1. 기전설비과-8461(2016.10.11.)호와 관련입니다.

2. 우리 부에서 추진중인 ‘뚝도정수센터 농축조 슬러지수집기 제작구매설치’건의 계약기간을 변경하고자 하오니 아래와 같이 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 뚝도정수센터 농축조 슬러지수집기 제작구매설치

나. 계약번호 : 제2016033489500호

다. 계약대상 : 주식회사 티에스엔텍(대표 : 곽병섭)

라. 변경사항 : 계약기간 변경

1) 당초 : 2016.03.16. ~ 2016.10.12.

2) 변경 : 2016.03.16. ~ 2017.06.30.(증 261일)

마. 변경사유 : 납품 전 선행사업(농축조 구조물 설치공사) 지연

바. 귀책사유 : 우리 본부

붙임  1. 보고서  1부.

2. 합의서  1부.  끝.

	기전설비과장
주무관	이상록		기전설비과장	10/12 서대훈
협조자
시행	기전설비과-8467	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1335	/전송	3146-1319	/	rock1975@seoul.go.kr	/	대시민공개