문서번호	시설보수과-3419
결재일자	2016.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
이원근	김재봉	강병수	10/13 정흥순
협 조

- 홍제천 제3교 상류~백련교 상류 차집관로 보수공사 - 준공기한 연기 보고

2016. 10

난지물재생센터

[시설보수과]

준공기한 연기 보고

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 홍제천 제3교 상류 ~ 백련교 상류 차집관로 보수공사

❍ 사업기간 : 2016. 6. 20 ~ 2016. 10. 17

❍ 사업개요

- 차집관로 비굴착 보수 D=1,200mm, L=407.5m

※ 공정율 : 비굴착 보수를 위한 준설작업 중(10%)

❍ 총사업비(도급액) : 410,041,000원

□ 보고내용

❍ 수방기간(2016. 6. 15~2016. 9. 15) 및 우천 시 하천 내 공사금지로

공사 착공이 지연되어 절대 공기가 부족한 실정으로 불가피하게 준공

기한을 연기코자 함.

□ 조치의견

❍ 준공기한을 아래와 같이 연기하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

- 당 초 : 2016. 6. 20 ~ 2016. 10. 17

- 변 경 : 2016. 6. 20 ~ 2016. 12. 10

- 연기 귀책사유 : 난지물재생센터

- 지체상금 부과여부 : 미부과  끝.