문서번호	시설과-5593
결재일자	2016.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설과장
강희진	임록화	10/13 진병규
협 조

『개포디지털혁신파크 태양광발전시설 기초보강 및 전기배선공사』

공사기한 연장 검토 보고(2차)

2016. 10

동부공원녹지사업소

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『개포디지털혁신파크 태양광발전시설 기초보강 및 전기배선공사』

공사기한 연장 검토 보고(2차)

개포디지털혁신파크 태양광발전시설 기초보강 및 전기배선공사 시행과 관련하여 공사기한 연장이 필요하여 검토보고 합니다.

Ⅰ		추진개요

○ 공  사  명 : 개포디지털혁신파크 태양광발전시설 기초보강 및 전기배관공사

○ 공사내용 : 태양광 발전시설 기초보강, 전기배선

○ 착공일자 : 2016. 9. 9

○ 준공기한 : 2016.10.14

○ 도 급 자 : (주)케이디파워 대표 김임배

○ 도 급 비 : 10,480,000원

Ⅱ		추진경위

○ 2016.9.9 : 공사계약 및 착공

○ 2016.9.30 : 준공기한 연장 검토보고(1차)

Ⅲ		준공기한 연기검토

❍ 연기기간

- 당  초 : 2016.9.9.~ 2016.10.14.

- 변  경 : 2016.9.9.~ 2016.10.26.

❍ 연기사유

- 태양광전지판 하부를 휴식공간으로 사용하므로 비샘방지 작업필요

- 디지털창업과에서 휴대폰충전기 위치를 1층 입구로 변경요청하여

별도 전원연결 작업필요

❍ 지체상금 부과여부

- 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

- 지체상금 : 미부과

Ⅳ		보고자의견

❍ 상기와 같이 준공기한을 연장하여 시공에 만전을 기하고자 함. 끝.