함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	기전설비과장
(경유)
제 목	물품 변경 계약 체결 안내(뚝도정수센터 농축조 슬러지수집기 제작구매)

1. 기전설비과-8467(2016. 10. 12.)호 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 ‘뚝도정수센터 농축조 슬러지 수집기 제작구매 계약’을 아래와 같이 변경하여 계약을 체결하였음을 알려드립니다.

가. 계약건명 : 뚝도정수센터 농축조 슬러지 수집기 제작구매

나. 계약업체 : ***********

다. 계약금액 : 922,690,000원

라. 변경내용 : 계약기간 변경

구 분	당초	변경	비 고
기간	2016.3.16.~ 2016.10.12.	2016.3.16.~ 2017.6.30.	증 261일

마. 변경 사유 : 우리본부 귀책사유임

- 선행사업(농축조 구조물 설치공사) 지연에 따라 납품기한 연장

따로붙임 : 변경계약서 1부. 끝

	재무회계과장
주무관	황한범		재무회계과장	10/13 박병식
협조자
시행	재무회계과-14875	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1243	/전송	02-3146-1209	/	h2sb@seoul.go.kr	/	부분공개(5)