함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	공사시행 방법 변경 지시(암사동 501-3 배급수관)

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 공단에서 감독중인 「암사동 501-3~496-26 외 8개소 배급수관 정비공사」와 관련하여 아래와 같이 공사시행 방법을 변경하여 시행하시길 지시하오니 감독업무에 만전을 기하시기 바랍니다.

○ 공사시행 방법 변경 지시 내역

- 공사위치 : 2구간(암사동)

- 당 초 : 야간공사

- 변 경 : 주간공사

- 변경 사유 : 주변 주민들이 소음으로 인한 수면방해로 생활불편이 많으니                              주간에 공사하여 줄 것을 지속적으로 민원 제기하여 수용함.  끝.

							강동수도사업소장
주무관							김주경			시설관리과장					전결 10/14 남정열
협조자
시행			시설관리과-20996									(						)		접수											(						)
우	05397					강동구 성내로 51(성내동 541-4)															/
전화		3146-5207						/전송			3146-5239					/	*********@seoul.go.kr												/	대시민공개