투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(물재생시설과장)
(경유)
제목	서남분뇨처리시설 예산 사용 변경 요청

1. 『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』과 관련입니다.

2. 우리본부에서 2016.10.25. 완료예정으로 마무리 작업 중에 있으나, 유지관리부서 요청사항 반영 등으로 시설비가 부족한 실정으로 2016년 예산 범위내에서 원활한 마무리를 위하여 아래와 같이 감리비를 시설비로 사업비 사용 변경을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 2016년도 예산 : 2,065,000천원

나. 예산과목 : 하수도특별회계, 물관리정책관 물관리정책과, 물재생시설

개선 및 관리, 물재생시설 개선, 서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업

나. 예산 통계목 변경

통계목	당초	변경	증	감	비고
계	2,065,000	2,065,000	105,000	105,000
시설비(401-01)	1,754,000	1,859,000	105,000
감리비(401-02)	305,000	200,000		105,000
부대비(401-03)	6,000	6,000

따로붙임 : 예산부족 사유(서남분뇨 시설비) 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이호기		환경설비과장	여인웅		설비부장	10/14 권오식
협조자	주무관	박시현
시행	설비부-16010	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8617	/전송	3708-8659	/	chance21@seoul.go.kr	/	대시민공개