투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(교통정책과장)
(경유)
제목	개화차량기지 증설유치선 운영사 선정 촉구 요청

1. 개화차량기지 증설유치선 운영사 선정 요청과 관련입니다.

가. ‘시설물 인수인계 관련 재회신’ 교통정책과-22867(’16.10.14)호

나. ‘회의결과 알림’ 도시철도설비부-10605(’16.9.29)호

다. ‘회의참석요청’ 도시철도설비부-10415(’16.9.26)호

라. ‘운영사 선정 요청’ 도시철도설비부-10159(’16.9.20)호

마. ‘회의결과 알림’ 도시철도설비부-8330(’16.7.29)호

2. 우리부는 귀 과의 의견(개화차량기지 유치선증설공사 준공 이후 운영사 선정)을 수용하기 위해 국토교통부 산하 교통안전공단에 질의한 내용과 그 회신내용을 알려드립니다.

○ 우리부에서 교통안전공단에 질의한 내용

- 증설유치선 시설물에 대한 철도종합시험운행(연간계획, 세부계획, 사전점검 및 영업시운전 등) 시 운영사 참여 없이 시행 가능 여부

○ 교통안전공단 회신 내용

- 철도종합시험운행은 철도안전법 제38조 및 동법 시행규칙 제75조제2항에 따라 철도시설관리자가 철도운영자와 합동으로 실시하여야 하며 철도종합시험운행 시행지침 제9조의 사전점검 단계에서부터 철도시설관리자와 철도운영자가 합동으로 시행하여야 함

3. 우리부는 남측 8개 증설 유치선에 대해서 ’16년 12월에 공종별시험을 완료하여 ’17년 1월 중 철도종합시험운행 추진하기 위하여 귀 과에 개화차량기지 증설유치선에 대한 운영사를 ’16.10.10까지 선정해줄 것을 요청했었으나 아직 선정되지 않았으니 귀 과에서는 증설유치선에 대한 운영사를 빠른 시일내 선정하여 우리부에 통보하여 주시기 바랍니다.(※ 추가 구매차량은 운영사 선정이 완료됨)

○ 개화차량기지 유치선 증설공사 추진일정

- ’16년 12월   : 남측 8개 증설 유치선 공종별시험 완료

- ’16년 12월말 : ’17년 철도종합시험운행 연간계획 제출(→교통안전공단)

- ’17년  1월초 : 남측 8개 증설 유치선 사전점검 실시

- ’17년  1월중 : 철도종합시험운행 세부계획 제출(→교통안전공단)

- ’17년  3월중 : 운영사, 남측 8개 증설 유치선 사용

- ’17년  6월말 : 북측 15개 증설 유치선 공종별시험 완료

- ’17년  7월초 : 북측 15개 증설 유치선 사전점검 실시

- ’17년  7월중 : 철도종합시험운행 세부계획 제출(→교통안전공단)

- ’17년  9월중 : 운영사, 북측 15개 증설 유치선 사용

4. 아울러, 운영사 선정이 늦어져 개화차량기지 증설 유치선 공사일정 및 해당 증설 유치선의 사용시기가 지연되어 9호선 추가 차량 투입시기에 영향을 미칠 경우 전적으로 귀 과의 책임임을 알려드립니다.

붙임 : 교통안전공단 질의 및 회신 공문 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★전문관	김현수		신호과장	김영하		도시철도설비부장	10/14 정찬웅
협조자	차량과장	강치석
시행	도시철도설비부-11279	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7326	/전송	02-772-7308	/	hihyeonsu@seoul.go.kr	/	대시민공개