문서번호	시설과-5609
결재일자	2016.10.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설과장		동부공원녹지사업소장
강희진	임록화	진병규		10/14 이춘희
협 조

『보라매공원 현장근로자 근로환경개선공사(전기, 전기소방)』

공사기한 연장 검토 보고

2016. 10

동부공원녹지사업소

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『보라매공원 현장근로자 근로환경개선공사(전기, 전기소방)』

공사기한 연장 검토 보고

보라매공원 현장근로자 근로환경개선공사(전기, 전기소방) 시행과 관련하여, 선행공종(건축)의 지연에 따른 전기 및 전기소방분야 연관공정 시행을 위하여 공사기한 연장을 검토, 보고합니다.

※시설관리공단 공사감독3처-9270(‘16.10.10)

Ⅰ		추진개요

○ 공 사 명 : 보라매공원 현장근로자 근로환경 개선공사(전기, 전기소방)

○ 공사내용 : 전기공사 1식, 전기소방공사 1식

○ 착공일자 : 2016.3.18

○ 준공기한 : 2016.10.17

○ 도 급 자 : 태진정보통신(주) 대표 정태수

○ 도 급 비 : 105,624,700원

Ⅱ		추진경위

○ 2016. 3.18 : 공사계약 및 착공

○ 2016. 7.29 : 공사실정보고 1회

○ 2016. 9. 9 : 공사실정보고 2회

○ 2016.10. 4 : 공사실정보고서 제출(3회)

○ 2016.10.11 : 공사실정보고서 제출(4회)

Ⅲ		준공기한연기검토

❍ 연기기간

- 당  초 : 2016.3.18.~ 2016.10.17.

- 변  경 : 2016.3.18.~ 2016.11.4.

❍ 연기사유

- 선행공종(건축)의 지연으로 인해 후속 공종인 본 공사의 공사진행이 지연되어 계약기간 내에 공사 완료가 어려우므로 준공기한 연장필요

❍ 지체상금 부과여부

- 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

- 지체상금 : 미부과

Ⅳ		보고자의견

❍ 상기와 같이 준공기한을 연장하여 시공에 만전을 기하고자 함.

첨부 : 준공기한 연기요청 공문(시설관리공단)1부. 끝.