문서번호	조경과-14816
결재일자	2016.10.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	조경시설팀장	조경과장
조현	하재호	10/14 代김호석

2016년 암사동 마을숲 조성 추진계획

2016. 10.

푸른도시국

(조 경 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□	주민설명회
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	설계심의
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	■	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년 암사동 마을숲 조성 추진계획

주택가 인근 방치된 자투리땅에 수목 식재 등으로 마을 숲을 조성하여 생활권 주변에 녹지공간을 확충하고 가로경관을 개선하고자 아래와 같이 “2016 암사동 마을숲 조성사업”을 추진하고자 함.

Ⅰ				추 진 방 향

아파트 재건축 등으로 활용도가 떨어진 자투리땅 매입

주변 공원과 연계, 주민이용이 자유로운 커뮤니티 숲공간 조성

생활권 주변 녹지공간 확충으로 쾌적한 가로경관 조성

Ⅱ				추 진 경 위

’16. 1. 28. : 토지매매 관련 감정평가 요청

(강동2단지아파트재건축정비사업조합→강동구)

’16. 3. ~ 9. : 토지매매 관련 주민협의(강동구)

- 현장방문 및 조합측 의견 조회

- 공시지가 이상 보상 토지매입을 요청하는 조합측을 설득하여 공시지가 적용, 매입 협의완료

Ⅲ				마을숲 조성계획

사업기간 : 2016. 10. ~ 12.

대 상 지 : 강동구 암사동 413-5 일대

규    모 : 856.2㎡

사업내용 : 토지보상, 마을숲 조성 등

- 토지보상 : 강동구 협의매입 계획에 의거, 공시지가로 매입

	토 지 보 상 개 요
○ 대 상 지 : 강동구 암사동 413-5 ○ 규 모 : 56.2㎡ ○ 도시계획/지목 : 제3종 일반주거지역/임야 ○ 소 유 자 : 강동2단지아파트재건축정비사업조합 ○ 보 상 액 : 151,964,800원 - 적용금액 : 2,704,000원/㎡(’16.1. 기준 공시지가)

- 마을숲 조성

· 인근 공원과 연계한 주민들의 소통과 휴식이 가능한 숲 조성

· 주변 여건상 옹벽으로 둘러싸인 대상지의 진입여건 개선

· 소음 등으로 인한 불편 없도록 경계, 차폐숲 조성

· 도시녹화 시행지 안내판 설치 등

소요예산 : 352백만원(보상 152, 시설공사 등 200)

※ 당초 토지보상 예산(300백만원) 중 148백만원 절감

Ⅴ				향 후 계 획

’16. 10. : 토지매입비 및 설계비 재배정(시 → 강동구)

’16. 10. : 시유재산 취득신고(강동구 → 시)

’16. 11. : 설계심의 시행, 공사발주

- 실시설계 이전에 시 조경과 설계심의 요청

※ 설계심의 요청시 시의회 소통결과 첨부

’16. 12. : 공사준공

붙 임 1. 위치도 및 현황사진 1부.

2. 재산 취득보고(서식) 1부.

3. 설계심의 요구서(서식) 1부.

4. 착공(준공)보고(서식) 1부.  끝.