문서번호	도로보수과-10207
결재일자	2016.10.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
권세봉		代이상하	10/14 한동근
협조
	주무관		이상하

2016년 자전거도로 유지보수사업

시행계획 보고(장충단로 외 3개소)

2016.  10. 13.(목)

서부도로사업소

(도로보수과)

2016년 자전거도로 유지보수사업

시행계획 보고(장충단로 외 3개소)

2016년도 자전거도로 시 경계 상충구간 및 자전거횡단도 정비사업 시행 구간인 장충단로 외 2개소에 대하여 안전하고 편리한 자전거 이용활성화를 위한 개선사업을 시행코자 함.

□ 관련근거

○ 자전거도로 유지보수공사 예산배정 및 공사시행 협조 요청

- 자전거정책과-3335(2016.09.27.) 예산배정액 : 47,728천원

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2016년 자전거도로 유지보수사업

○ 위    치

- 중구 장충단로(장충체육관~남산2호터널입구)

- 은평구 수색로 덕은교 삼거리

- 은평구 북한산로 지축교, 북한산입구

○ 총사업비 : 39,676천원

○ 개선내용 : 자전거 횡단도설치, 노면표시 개선 등

자전거횡단도 설치	횡단보도축소 후 자전거횡단도 설치

□ 공사내용

○ 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 : 39,676천원(관급자재 포함)

- 노면표시 도색 : 3,699m

- 노면표시 제거 :  3,471m

□ 조치계획

○ 교통개선공사 발주 시 업체선정까지 기간소요 등으로 별도 발주 시행은 곤란하여 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)에 포함하여 시행코자 함.

- 공사기간 : 2016. 10. 12. ~ 2016. 11. 30.

- 필요금액 : 약 35,211천원(시공 물량에 따라 추후 정산)

○ 관급자재 사용검토

- 노면표시 도색공사에 사용되는 특수페인트는 2016년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사의 납품 계약된 수량 사용 후 정산.

○ 사업비 집행 현황

(단위 : 천원)

사업명	예산배정액	노면표시		집행잔액
		도급비	관급비
자전거도로 유지보수사업	47,728	35,211	4,465	8,052

○ 예산과목

- 자전거정책과, 자전거이용 활성화 및 교통환경 개선, 자전거이용시설 확충 및 관리, 자전거도로 유지보수, 시설비(401-01)

□ 향후계획

○ 2016. 10. 14 : 개선공사 작업지시 및 공사 시행.

○ 2016. 11. 30 : 개선공사 완료

○ 2016. 12. 10 : 설계변경 정산 및 개선공사 결과보고

붙 임 : 1. 설계내역서 1부.

2. 설계도면 1부.

3. 관련 문서 1부.  끝.