문서번호	도로보수과-9491
결재일자	2016.10.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	도로보수과장
이문희		송광석	10/14 김환겸
협조

“2016년 포장도로 굴착복구공사”

사후정비 공사구간 포장계획 변경 검토 보고

2016. 10.  .

동부도로사업소

도로보수과

“2016년 포장도로 굴착복구공사”

사후정비 공사구간 포장계획 변경 검토 보고

포장도로 굴착복구공사 사후정비 공사구간인 올림픽로(성내교~풍납사거리)에 포장계획을 변경하고, 아스팔트 중층 포장재를 WC-5에서 재생#67로 변경하여 효율적인 도로 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ	사업개요

❍ 2016년 포장도로 굴착복구공사

⦁계약업체 : 노흥건설주식회사 대표 김일환

⦁계약금액 : 2,528,325,000원

⦁공사기간 : 2016.3.03. ~ 12.31.

⦁공사규모 : 굴착복구 133a, 차로단위복구 475a, 굴착사후정비 900a

Ⅱ	추진경과

❍ 2016. 02. 04. : 공사발주

❍ 2016. 02. 29. : 공사계약

❍ 2016. 03. 03. : 공사착공

❍ 2016. 08. 18. : 제1차 설계변경

Ⅲ	보고내용

❍ 올림픽로(성내교~풍납사거리) 구간은 교차로 정지선 앞과 버스정류장 부근은 일반SMA(5㎝) 포장으로 계획되어 있고, 나머지 구간은 일반 WC-3(5㎝)로 계획되어 있으나,

❍ 동 구간의 교차로 정지선 앞과 버스정류장 부근은 소성변형이 심하고 잔여구간은 균열발생이 심하여 중간층 보수가 필요한 상태임.

※ 소성변형구간 및 균열발생구간 별첨 사진

❍ 동 구간은 SMA 포장과 WC-3 포장 구간이 혼재되어 있어 시공시 종·횡 조인트 발생으로 시공 하자가 우려됨.

❍ 아스팔트 중층 포장재는 WC-5로 계획되어 있으나, 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」제2조, 제15조, 제38조 및 영 제5조의 규정에 따라 재생#67을 사용이 필요함.

Ⅳ	조치계획

❍ 상기 보고내용과 같은 사항으로서 현장 여건을 감안하여, 교차로 내를 제외하고 전구간은 소성변경 및 균열보수를 위해 10㎝ 절삭 포장 후, 중층은 재생#67(5㎝)을 시공하고, 표층은 정지선 구간만 SMA 포장으로 시공하고, 일반구간은 WC-3(일등급) 포장으로 변경 시공코자 함.

붙임 : 1. 당초 및 변경도면 1부.

2. 현황사진 1부.  끝.