문서번호	시설과-6899
결재일자	2016.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관	주무관		시설과장		관리부장		서울대공원장
박도원	代박도원		공헌구		홍순길		10/17 송천헌
협 조

대공원 기계시설물 현장점검 계획(안)
『안전사고 방지를 위한』 대공원 기계시설물 현장점검 계획(안)

2016. 10월

서울대공원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 1호~8호	□	■

『 안전사고 방지를 위한』

대공원 기계시설물 현장점검 계획(안)

대공원 노후 기계시설물 기반시설 및 건물별 설비에 대해서 현장 사전점검을 시행하여, 건물별 현황과 문제점 등을 조사하여 보수를 통한 안전사고 방지와 담당자 전문교육을 통한 업무능력 향상에 기여코자 함.

Ⅰ		추진배경

□ 대공원 기계시설물 중 내구 연한이 경과된 시설물이 존치되어 안전사고 발생 우려가 있음

□ 현황 자료가 업그레이드 되지 않아 부정확하며, 건물별 설비 운전 지침서 부재로 임의 운전되고 있는 실정

○ 실내공기질 개선사업 중 공조기, 급･배기휀 가동시간 수립 필요

□ 업무 담당자 잦은 인사발령으로 현장 업무 인계가 부재하며, 시스템 운영과 현황 파악을 위해서 현장 직원들의 협조가 필요한 실정

□ 현장 직원 중 소수를 제외하고 전문 기술력 부족으로 대공원 기계시설물에 대하여 전문교육이 필요한 실정

Ⅱ		추진목적

□ 대공원 기계시설물 사전점검을 통해 노후 시설물 안전사고 예방

□ 주요 현황과 운전 지침서를 작성하여 현장 직원들에게 교육을 실시하여 전문 기술력 함양과 시설물의 관리 효율 증대

□ 담당자의 현장업무 지침 준수 및 실내공기질 개선사업에 활용

Ⅲ		기계시설물 점검 개요

□ 점검목적: 대공원 내 기계시설물 현황 및 문제점 조사

□ 점검일시: ‘16. 11. ~ ’17. 5. 14:00 ~ 17:00(7개월간)

□ 점 검 자: 기계화공팀 2명, 공무직 기계반장 1명, 현장근무자

□ 점검대상: 건물별 설비･덕트･위생배관, 공동구 배관, 가스시설, 소방시설, 옥외 화장실, 음수대, 펌프장, 배수지 등

□ 점검내용

○ 건물별 설비 현황 및 계통도 조사

○ 펌프장, 공동구 배관현황 및 계통도 조사

○ 가스시설 현황 및 문제점 조사

○ 소방시설(기계) 현황 및 계통도 조사

○ 배수지, 화장실, 음수대 현황 조사

□ 기계시설물 현황(‘15년 자료 기준)

○ 기계실 현황

주요장비	계	주보일러실	펌프장	배수지	오수처리장	동물사	사무실	분수대	비 고
개소	55	1	2	3	1	33	12	3

○ 주요 장비현황

주요장비	계	보일러	냉동기	공기조화기	송풍기	배수펌프	E/V
대수	168	35	1	15	28	88	1

○ 배관현황

- 상수도배관: D200~300mm(L=9,350m)

- 중온수배관: D50~200mm(L=9,383m)

- 소화배관: D50~100mm(L=5,599m)

- 잡용수배관: D80~400mm(L=5,542m)

○ 화장실 현황: 총 49개소

○ 소방 옥내소화전 현황: 13개동 63개소

○ 음수대 현황: 57개소 61대

○ 도시가스시설: 정압기 총 11개소, 가스사용처 35개소

Ⅳ		세부 추진계획

□ 대상별 세부 점검계획

대상 시설물	점검일정	점검대상	조사 내용	비고
옥외 화장실 (25개소)	‘16. 11. (2주간)	위생기기, 배관(급수, 급탕, 배수, 오수, 통기관)	화장실 피트 내 배관 재질, 관경, 보온재 현황 조사 위생기기 수량 및 종류, 상태 배기팬 작동상태, 가동시간
공동구, 음수대 등	‘16. 11. (2주간)	상수도, 잡용수, 소방, 난방배관 옥외 음수대	공동구 내 배관재질, 관경, 보온재 현황 공동구내 소방설비 공동구 내 음수대 분기관경 및 재질 조사
동물사 (33개동)	‘16. 12. ~ 17. 2. (3개월)	장소: 기계실, 건물 내 대상: 설비, 배관, 덕트, 위생기기	설비에 대한 현황, 가동시간, 작동상태 조사 배관재질, 관경, 보온재 현황 조사 건물별 주요 점검사항 조사 사용자 불편 및 건의사항 조사
사무실 (12개동)	‘17. 3. ~ ‘17. 4. (2개월)
기반시설 (7동)	‘17. 5. (1개월)	조절저수지 수문, 개폐밸브, 폭포수펌프 펌프장 내 설비 배수지	설비에 대한 현황, 가동시간, 작동상태 조사 배관 재질, 관경, 보온재 현황 조사 배수지 내부 상태 및 수위계 작동상태 점검

□ 점검결과 성과물

○ 대공원 기계시설물 현황바인더 업그레이드

○ 건물별 기계시설물 CAD 도면 작성

○ 기계시설물 운전 지침서 수립

- 기반시설인 제1･2펌프장, 배수지, 조절저수지 기계실 점검표 및 운전 지침서 수립

- 건물별 기계실 점검표 및 운전 지침서 수립

- 건물별 공기조화기, 급･배기팬 계절별 가동시간표와 운전 지침서 수립

- 보일러, 냉동기 외기 온도별 가동시간표와 운전 지침서 수립

○ 운전 지침서 및 도면을 안내판으로 제작하여 해당 장소에 게시

○ 운전 지침서를 활용하여 공무직 전문교육 시행(월 2회)

○ 안전사고 방지를 고려한 기계시설물 개선공사 설계

- 고장난 기계시설물 보수 및 기계설비 시스템 개선공사

- 건물별 수도계량기 설치공사

- 가스, 소방시설물 교체 및 보수공사

□ 기타 추진계획

○ 수시사항: 기계시설물 긴급보수 시행

○ 월별사항: 점검 추진상황 보고, 공무직 교육 시행

○ 보고사항: 단위 시설물별 점검결과 보고, 종합 점검결과 완료보고

Ⅴ		기대효과

□ 기계시설물 문제점을 개･보수하여 안전사고 방지와 에너지 절감에 기여

□ 기계시설물 운전 지침서를 토대로 긴급 사고 시 위기 대처능력 향상 및 신규자 업무 인계시간 단축

□ 대공원 기계시설물에 대한 전문교육 시행으로 업무 능력 향상 및 기술인으로서의 자부심 고취

Ⅵ		향후 추진일정

□ ‘16. 10. : 점검시설물 기존 현황자료 및 CAD자료 수집

□ ‘16. 11. : 옥외화장실, 공동구, 옥외음수대 점검

□ ‘16. 12. ~ ’17. 2. : 동물사 33개동 기계시설물 점검

□ ‘17. 3. ~ ’17. 4. : 사무실 12개동 기계시설물 점검

□ ‘17. 5. : 기반시설 기계시설물 점검

□ ‘17. 6. : 종합 점검결과 완료보고.  끝.