문서번호	시설관리과-20945
결재일자	2016.10.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
기전팀장		시설관리과장
노성제		전결 10/17 代박미영
협조

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

『2016년 상수도관 전식방지공사』

2016. 10.

북부수도사업소

(시설관리과)

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

『2016년 상수도관 전식방지공사』

우리사업소에서 시행중인『2016년 상수도관 전식방지공사』에 대하여 사후정산 대상 보험료 및 제경비 정산을 위한 설계변경 심의위원회를 개최하여 변경내용을 심의완료 후 그 결과를 보고드림.

1. 일 반 현 황

가. 공 사 명: 2016년 상수도관 전식방지공사

나. 공사개요: 전식방지공사 5개소(정류기반 5면, 양극홀 12개소, 기타 전기공사 1식)

다. 계약기간

1) 당  초: *****************************

2) 변  경: *****************************

라. 도 급 비

1) 당  초: *****************************

2) 변  경: *****************************

마. 도 급 자: ****************

2. 설계변경(정산) 사유

가. 사후정산 대상 각종 보험료의 실사용액을 확인하여 정산

1) 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료 및 퇴직공제부금비: 증액

2) 산업안전보건관리비: 감액

나. 일반관리비 등 제경비를 요율에 맞게 정산

3. 심의위원회 개최

가. 심의일정 : ***********************

나. 심의장소 : 북부수도사업소 시설관리과

다. 심의위원 : *************

**********************************

4. 심 의 내 용

○ 2016년 상수도관 전식방지공사 설계변경 심의

- 계약기간 변경사항

- 각종 보험료 정산금액 적정성 여부

- 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

5. 설계변경 금액

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증·감
총공사비	***********	***********	* *********
건강보험료	*	*********	* *********
연금보험료	*	*********	* *********
노인장기요양보험료	*	*******	**********
퇴직공제부금비	*	*********	* *********
산업안전보건관리비	*********	*********	**********

6. 계약기간 변경

- 당  초 : *****************************

- 변  경 : *****************************

7. 심 의 결 과

○ 설계변경의 타당성: 타당함.

○ 보험료 정산금액의 적정성: 적정함.

○ 제경비 산정 및 적용의 적정성: 적정함.

○ 계약변동 (증·감)물량 계약단가 낙찰률 적정 적용 여부: 적정함.

○ 각종 제반 규정 준수 여부: 준수.

○ 관련 규정의 불명확한 내용에 대한 검토: 적합.

붙 임 : 1. 설계변경 사유서 1부

2. 설계변경 심의 신청서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 설계변경 심의 결과서 1부.  끝.