투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재(커튼월,갤러리창) 납품기한 연장 요청 (재사용플라자 건립공사)

1. PC재사용16-447(‘16.10.14)호와 관련입니다.

2.「재사용플라자 건립공사」관급자재(커튼월,갤러리창) 납품기한 변경요청이 있어 검토한 바, 아래와 같은 사유로 연장코자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 물 품 명 : 커튼월, 갤러리창

나. 계 약 자 : (주)유니크시스템

다. 납품기한 변경사항

계약번호 (납품요구번호)	품 명	계약자	납품기한		비고
			변경 전	변경 후
00167005600 (12-16-1-23555-00)	단열커튼월	(주)유니크시스템	‘16.04.20 ∼ ’16.10.15	‘16.04.20 ∼ ’16.11.20	36일연장
00158192001 (12-16-1-23551-00)	갤러리창	(주)유니크시스템	‘16.04.20 ∼ ’16.10.15

라. 사   유 : 공기연장에 따른 골조공사와 연계하여 커튼월 제작·

설치로 인한 납품기한 연장 필요

마. 귀책사유 : 도시기반시설본부(지체상금 미부과)

붙 임 : 관급자재(커튼월,갤러리창) 납품기한 연기요청(건설사업관리단 검토의견서포함) 1부. 끝.

	건축부장
주무관	김찬유		환경시설과장	유현수		건축부장	10/17 代박범규
협조자
시행	건축부-14167	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)프리미어플레이스 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2649	/전송	02-3708-2659	/	kcy111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)