문서번호	기전과-11236
결재일자	2016.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
장병준		10/17 양영민
협조

을지로7가우체국교차로 실정보고 검토보고서

('16년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10.

서부도로사업소

(기전과)

을지로7가우체국교차로 실정보고 검토보고서

('16년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사)

『을지로7가 우체국 교차로 ‘16년 횡단보도확충 정비사업 교통신호기 공사』와 관련하여 책임감리자가 제출한 현장 실정보고에 대하여 검토하고 그 결과를 보고함.

□ 관련문서

○ ㈜트래픽스 TR-개선-1008호(2016.10.13.) : 현장 실정보고서 제출

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2016년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사

(을지로7가우체국 교차로)

○ 공사위치 : 중구 을지로 284 을지로7가 우체국교차로

○ 공사내용 : 교차로 서측 횡단보도 신설 등에 따른 교통신호기 설치공사

○ 계약금액 : 금24,905,150원

○ 공사기간 : 2016.8.16. ∼ 2016.10.30.

○ 계약업체 : ㈜한일이앤에스 대표 박완교

□ 보고내용(감리) 및 검토의견

감리 보고내용	검토의견	수용여부
P6차량지주는 - 당초:250mm지주, 9m부착대임 - 변경:200mm디자인통합지주 7m부착대 - 사유:부착대가 반대차선으로 넘어감	차로폭을 감안하여 변경이 타당함.	수용
P7의 경우 125mm×4m 보행지주 설치는 기 설치되어 있는 200mm 가공지주를 이설하여 보행등과 음향신호기를 설치함	의견없음	수용

감리 보고내용	검토의견	수용여부
교통신호제어기 당초 보도설치에서 교통섬으로 이설(중부경찰서 요청)	제어기 수동조작시의 교통통제의 효율성을 감안할 경우 타당함.	수용
P1지주는 이설 예정이었으나 이설위치에 가로등주가 설치되어 있어 가로등주에 보행등과 음향신호기 설치함.	기능과 유지관리에 지장없는 것으로 판단됨.	수용
기존관로 재사용에 따른 아스팔트 횡단굴착 타절	의견없음	수용

□ 조치의견

○ 감리 실정보고 내용대로 작업토록 지시하고 추후 준공시 내역 정산코자 함

붙 임 : 감리 실정보고서 1부.  끝.