문서번호	시설과-5661
결재일자	2016.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	시설팀장	시설과장		동부공원녹지사업소장
김영균	임록화	진병규		10/17 이춘희
협 조
	주무관		이전호

준공기한 연기 검토보고

= 보라매공원 현장근로자 근로환경 개선공사(건축) =

2016. 10.

동부공원녹지사업소

(시     설     과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

준공기한 연기 검토보고

= 보라매공원 현장근로자 근로환경 개선공사(건축) =

우리사업소에서 추진 중인 『보라매공원 현장근로자 근로환경 개선공사(별동신축)』와 관련하여 계획변경 등에 따라 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 함.

Ⅰ		공 사 개 요

위    치 : 동작구 여의대방로20길 33(보라매공원 내 북동산 초입)

공사기간 : 2016. 03. 07. ~ 2016. 10. 20

계약금액 : 일금육억팔천사백팔십일만이천구백원정(￦684,812,900원)

시 공 자 : ㈜푸른종원건설 대표 차상민

공사규모 : 지상 2층, 연면적 468.50㎡ / 용도 : 현장근로자 대기실 및 창고

Ⅱ		검토내용

준공기한 변경

구 분	계 약 기 간	비 고
당 초	2016.03.07 ~ 2016.10.20
변 경	2016.03.07 ~ 2016.11.04	15일 연장

연기사유

▸ 정화조 및 주계단 데크시공 등 추가공가

▸ 전반적인 조경계획 변경

지체상금 부과 검토

▸ 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

▸ 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅲ		처리의견

준공기한 연기사유가 타당하므로 계약부서에 준공기한 연기 요청코자 함

붙임 : 1. 준공기한 연기 요청 공문 1부.

2. 합의각서 1부. 끝.