문서번호	기전과-5423
결재일자	2016.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
김용문		10/17 유재옥
협조

준공기한 연기 검토보고

『2016년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가)』

- 4차작업

2016. 10.

남부도로사업소

(기전과)

준공기한 연기 검토보고

『2016년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사-4차작업

『2016년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가)』의  제4차작업 시행중 감리원으로부터 기한연장 요청있어 아래와 같이 검토 및 조치코자 합니다.

Ⅰ	공사현황

○ 공 사 명 : 2016년 교통안전표지 설치 및 유지보수 공사(연간단가)

○ 공사개요 : 교통안전표지 신설/철거 등

○ 도 급 액 : 금107,470천원

○ 도급업체 : 대한로드라인페인트(주) 대표 강완혁

○ 공사기간 : 2016. 3. 14. ~ 12. 31.

※ 제4차 작업기간 : 2016.8.29. ~ 2016.10.17

○ 감리회사 : ㈜트랙픽스 대 표 김 희 수

Ⅱ	보고내용

○ 실정보고내용

- 교통안전표지의 설치 4차작업물량중 대부분이(속도하향 등) 노면표지와 연계되고 금회(4차) 작업기한이 2016.10.17일까지이나 노면표지 공사가 2016.10.24일까지이며, 추가 작업물량(8개소)이 발생됨에 따라 4차작업기간을 10월31일까지 연장이필요함

○ 감의의견 : 준공기한 연기 필요

○ 검토의견 : 4차작업 준공기한을 2016년 10. 31일까지 연장

○ 준공기한 변경내용

구 분	당 초	변 경	비 고
4차작업기한	2016.08.29. ~ 10.17.	2016.08.29. ~ 10.31.

Ⅲ	보고자 의견

○ 금회 4차작업지시한 작업기한에 대하여 준공기한을 2016.10.31일까지 연기하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 준공기한연기 실정보고 내역 1부.  끝.