투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	추가공사 지시(서강대후문 교차로외 2개소)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. ‘15년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(서강대후문 외 2개소)와 관련하여 아래와 같이 추가 공사를 지시하오니 공사시행 및 설계변경(내역정산)에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : ‘15년 도로교통소통 개선사업 교통신호기 공사(서강대후문 외 2개소)

나. 공사기간 : 2015.10.5.~2016.12.31

다. 계약금액 : 금100,133,000원

라. 추가 공사내용

- 위    치 : 마포구 동도중학교 앞

- 공사내용 : 해당지점 좌회전·유턴 신설에 따른 기존 3색 차량신호등을 4색 신호등으로 교체 등

마. 기타사항

- 변경사항은 준공도면 제출 시에 누락되지 않도록 표기

- 변경(증감) 물량은 설계변경 및 준공시에 물량 반영하여 정산.

첨 부 : 관련문서(규제) 1부. 끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
수신자	(주)트래픽스,현광전력(주)
주무관	장병준		기전과장	10/17 양영민
협조자
시행	기전과-11289	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203(상암동 835)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8406	/전송	02-300-8410	/	hijun39@seoul.go.kr	/	대시민공개