투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	「개포디지털혁신파크 옥상녹화·텃밭조성 사업」설계변경 시행

1. 시설과-5688(2016.10.18.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 추진 중인 『개포디지털혁신파크 옥상녹화·텃밭조성 사업』에 대하여 아래와 같이 설계 변경하여 공사추진에 만전을 기하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 개포디지털혁신파크 옥상녹화·텃밭조성 사업

나. 도 급 액 : 금148,466,000원(금일억사천팔백사십육만육천원)

다. 공사기간 : 2016. 07. 26 ~ 10. 20

라. 도 급 자 : 대조종합건설(주) 대표 임홍순

마. 공사비 변경내역

(단위 : 원)

구 분	소요 금액				비고
	당 초	변경	증 / 감
총 공 사 비	195,456,580	209,702,093	증	14,245,513
공 급 가 액	134,969,092	148,078,183	증	13,109,091
부 가 가 치 세	13,496,908	14,807,817	증	1,310,909
도 급 공 사 비	148,466,000	162,886,000	증	14,420,000
관급자재비	46,990,580	46,816,093	감	174,487

바. 예산과목

- 조경과, 생활주변녹지확충 및 시민참여활성화, 시민참여녹지조성, 옥상녹화 텃밭조성, 시설비(401-01)

붙  임 : 1. 실정사항 검토 및 설계 변경 보고서 1부.

2. 변경 내역서 1부. 끝.

	시설과장
주무관	최종성		시설팀장	임록화		시설과장	10/18 진병규
협조자
시행	시설과-5693	(		)	접수		(		)
우	07062	서울 동작구 여의대방로20길 33 동부공원녹지사업소 시설과	/
전화	02-2181-1161	/전송	02-2181-1169	/	jongsung79@seoul.go.kr	/	대시민공개