투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(2차) 시행 - 2016년 도로손상부분 긴급복구공사(연간단가)

우리사업소에서 시행중인 『2016년 도로손상부분 긴급복구공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(2차)을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2016년 도로손상부분 긴급복구공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2016. 03. 03~ 2016. 12. 31

다. 계약금액 : 금665,008,000원

라. *************************

마. 설계변경사유

○ 서울형 포장설계법 적용 계획단면 설계(2016.5.12) 및 교차로․ 버스전용차로 소성변형 발생구간 포장설계 단면 설계(2016.7.7)에 시일이 소요되어 노후포장도로 정비구간에 미포함 및 본 공사에 추가물량 발생

○ ‘16년 하반기 노후포장도로 정비계획 통보(도로관리과-4678, 2016.9.28)               및 청량리 환승승강장 정비계획 보고(도로보수과-4922, 2016.10.11)에

의거 정비물량 증가

○ ‘16년 지속적인 폭염으로 소성변형 및 포트홀이 폭발적으로 증가되어                소규모 포장복구 정비물량 증가

바. 변경내역                                          (단위 : 원)

공 종	금 액(원)			비 고
	당 초	변 경	증 ․ 감
계	1,500,508,000	2,293,446,600	792,938,600
도급비	665,008,000	1,357,923,600	692,915,600
관급비	428,975,000	607,506,000	178,531,000
이전비	406,525,000	328,017,000	78,508,000

사. 예산과목

- 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물 관리, 노후포장도로정비공사, 시설비

붙임 : 1, 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.   끝.

주무관	이기영		도로보수과장	이상호		성동도로사업소장	10/18 이종엽
협조자	계약1팀장	조현
시행	도로보수과-5114	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41	/
전화	2210-1538	/전송	2210-1549	/		/	부분공개(5)