문서번호	방재시설부-16196
결재일자	2016.10.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경시설과장	방재시설부장
임봉규		신용우	10/18 임춘근
협조
	광역도로과장		진재섭

사가정길 확장공사(조경)   감리 실정내용 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

〖방재시설부〗

『사가정길(장안삼거리~전농사거리)확장공사』

감리 실정내용 검토보고

사가정길 확장공사 관련, 동대문구 가로수 식재수종 변경요청 및

서울시 도시공원위원회 소위원회(가로수심의) 개최결과를 반영한

조경공사 변경사항에 대한 감리사 실정보고 검토결과임.

Ⅰ		관련문서

○ 삼안 사가정길 2016-59(2016.10.12)호

⇒ 가로수 식재 수종변경 실정보고

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 사가정길 확장공사

○ 위    치 : 장안삼거리 ~ 전농동 사거리

○ 규    모 : 교차로구간 확장(전체 1.2km 중 520m)

- 배봉사거리 구간 : 폭6~7차로, 연장 390m

- 전농동사거리 구간 : 폭6차로, 연장 130m

○ 공사기간 : 2016.02.29 ~ 2016.12.31

○ 도 급 액 : 7,964백만원 (조경124백만원)

○ 시 공 사 : 고양종합건설(주)

○ 감 리 사 : ㈜삼안

○ 조경공사

- 수목이식 : 15주     - 수목제거 : 88주

- 수목식재 : 96주     - 가로수 보호판 : 96조

Ⅲ		실정내용 및 검토결과

구 분	실정보고(감리)	검토결과	비 고
조경공사 변경	◦ 수목식재 - 교목 : 96주 → 118주 (은행,벚나무 → 이팝나무) ◦ 시설물 - 가로수 보호판 : 96조 → 118조	◦ 동대문구 가로수 수종 변경 요구사항 및 도시공원위원회 개최결과를 반영.

Ⅳ		물량 및 공사비

□ 물량변경내역                                                               (단위:천원)

구 분	당 초		변 경		증·▽감	비 고
	주요 내용	금 액	주요 내용	금 액
식재, 시설물	- 은행나무(B15) 49주 - 왕벚나무(B15) 47주 - 수목보호판 96조	91,459	- 이팝나무(R15) 118주 - 수목보호판 118조 통기관 236개	129,450	37,991
직공비계		91,459		129,450	37,991

□ 공사비 증감내역

(단위 : 천원)

공 종	당 초	변 경	증 감	비 고
직접공사비	91,458	129,449	37,991
제경비	33,051	45,011	11,960	부가세포함
도 급 액	124,509	174,460	49,951

Ⅴ		검토의견

○ 동대문구 가로수 수종변경 요청사항 및 도시공원위원회 소위원회 심의결과를

반영한 사항은 적정하다고 판단됨.

※ 신규단가는 낙찰율을 적용코자함.

낙찰율 : 86.745%

붙  임 : 내역서 1부.  끝