등록번호	안전치수과-22679		주무관		재난관리팀장	안전치수과장		안전건설국장		부구청장		구청장
등록일자	2016.10.13.
			차승환		김종호	신대식		이우룡		황치영		10/18 최창식
결재일자	2016.10.18.
공개구분	대시민공개
			협조	기획예산과장			권순우
				건축과장			이기봉
				도로시설과장			이동훈
중구 지진방재 종합계획
안전건설국 안전치수과

중구 지진방재 종합계획

최근 경주 지진(9.12) 이후 여진이 계속적으로 발생함에 따라 우리 구 공공건축물, 민간건축물의 내진성능 확보 및 예방․홍보․복구 활동을 강화한 지진에 강한 중구를 만들기 위한 종합계획임

Ⅰ		추진 근거

○ 지진·화산재해대책법 제9조의2 및 제16조의2

○ 구 실정에 맞는 지진방재 종합계획 수립[구청장 지시사항(2016.10.4.)]

Ⅱ		중점 추진사항

□ 공공건축물 분야

○ 공공건축물 내진성능평가 실시 후 단계적 내진보강 추진

□ 민간건축물 분야

○ 내진보강시 지방세(취득세 및 재산세) 감면율 확대 건의

○ 민간건축물에 대한 지진안전성 표시제(인증제) 시행

○ 건축물 내진성능 자가점검 시스템 활성화, 내진보강 유도

□ 예방 및 훈련과 복구체계 강화

○ 지진재난 종합훈련 실시(매년 5월 재난대응 안전한국훈련 시행)

○ 지진재난 대응체계 구축

- 재난안전대책본부 수습체계 확립 등

Ⅲ		세부 추진계획

1		주요 시설물 내진성능 확보 추진

□ 추진 개요

○ 내진설계 도입 현황

- 다목적 댐(‘79년), 터널(’85년), 건축물(’88년), 교량(’92년)

- 건축물 내진설계 기준 강화

· (’88년) 6층 이상, 연면적 10만㎡ 이상 → (현재) 3층 이상, 연면적 500㎡ 이상

○ 우리구 내진설계 추진현황 : 건축물 내진성능 강화대책 추진(모든 건축물)                                                      [구청장  방침 건축과-24588(2014.11.4.)]

- 공공시설물 내진성능 확보 현황

(단위 : 개소)

구 분	대 상	확 보	미확보	내진비율
계	133	30	103	22.5%
공공시설물 (특정관리대상시설)	40	9	31	23%
공공시설물 (특정관리대상시설 외)	93	21	72	22.5%

○ 추진대상(특정관리대상시설)

- 공공시설물 : 총 133개소

- 민간건축물 : 민간이 소유한 건축물도 집중관리 필요

○ 추진방향

□ 공공시설물 : 시설물별 내진성능평가 시행 후 필요 건축물 단계적 보강 추진

□ 민간건축물 : 제도 개선, 행·재정적 지원, 홍보·교육을 통한 의식 변화 유도

□ 소요예산

○ 내진성능평가 : 총 1,090백만원

- 2017년 재난관리기금 : 370백만원

- 2017년 일반예산     : 720백만원

○ 보수·보강    : 내진성능평가 후 단계적 추진

□ 공공시설물 - 내진성능평가 후 선별하여 단계적 보강 추진

□ 추진대상 : 공공시설물 3종(지진·화산대책법 제14조)

① 공공건축물  ② 지하보·차도  ③ 도로시설물

□ 추진현황

○ 내진성능 미확보

(단위 : 개소)

구 분		대 상	확 보	미확보	내진비율
계		133	30	103	22.5%
특정관리대상시설	공공건축물	23	9	14	39%
	지하보·차도	10	0	10	0%
	도로시설물	7	0	7	0%
특정관리대상시설외		93	21	72	22.5%

□ 시설물별 추진계획

1-1. 공공시설물(특정관리대상)	【건축과】

○ 대    상 : 14개소(총 23개중 9개소 내진설계 완료)

○ 추진방향

- 내진성능 평가 시행 후 내진보강 필요건축물 단계적 내진보강 추진

○ 추진계획

- ’16년  : 내진성능평가 소요예산 확보

- ’17년 : 평가결과 내진보강 필요건축물 단계별 보강계획 수립 및 예산확보

- ’18~’20년 : 단계별 내진보강 추진

○ 소요예산 : 250백만원(‘17년 재난관리기금), 보수·보강비용 미포함

1-2. 공공시설물(특정관리대상 외)	【건축과】

○ 대    상 : 72개소(총 93개중 21개소 내진설계 완료)

○ 추진방향

- 내진성능 평가 시행 후 내진보강 필요건축물 단계적 내진보강 추진

○ 추진계획

- ’16년  : 내진성능평가 소요예산 확보 추진

- ’17년 : 평가결과 내진보강 필요건축물 단계별 보강계획 수립 및 예산확보

- ’18~’20년 : 단계별 내진보강 추진

○ 소요예산 : 720백만원(‘17년 일반예산), 보수·보강비용 미포함

2. 지하보·차도(특정관리대상)	【도로시설과】

○ 대    상 :  10개소

- ’16년 : 지하보·차도 내진성능평가 소요예산 확보

- ’17년 : 평가결과 내진보강 필요 지하보·차도 단계별 보강계획 수립 및 예산확보

- ’18~’20년 : 단계별 내진보강 추진

○ 소요예산 : 100백만원(‘17년 재난관리기금), 보수·보강비용 미포함

3. 도로시설물(특정관리대상)	【도로시설과】

○ 대    상 :  4개소(보도육교 2, 인공데크 2)

※  총 대상 7개소중 대림·청계상가 인공데크는 서울시에서 보수·보강 예정이며,    남산입구 보도육교는 ‘17년 4월 철거 예정으로 있어 3개소 대상 제외

- ’16년 : 보도육교 및 인공데크 내진성능평가 소요예산 확보

- ’17년 : 평가결과 내진보강 필요 보도육교 단계별 보강계획 수립 및 예산확보

- ’18~’20년 : 단계별 내진보강 추진

○ 소요예산 : 20백만원(‘17년 재난관리기금), 보수·보강비용 미포함

□ 민간건축물–행·재정적 지원, 시민홍보․교육 강화, 제도개선

【건축과】

□ 현황 및 문제점

○ 현  황 (’16.6월. 현재)

(단위 : 개소)

구 분	대 상	확 보	미확보	확보비율
민간건축물	16,866	1,203	15,663	7.1%

○ 문제점

- 건물 소유주의 내진보강 인식 부족 및 내진보강에 따른 재정적 부담

- 내진보강에 따른 소요비용 대비 지방세 감면 등 인센티브 미흡

□ 추진 방향

○ 행·재정적 지원 : 지방세 감면제도, 자가점검시스템 운영, 재난위험시설 안전점검

○ 제도개선 : 인센티브 확대 건의, 안전 인증제 및 내진건축물 등급표시제 등 도입

□ 추진 계획

1. 행‧재정적 지원

○ 내진보강 시 인센티브(지방세 감면지원) 제도 운영

- 운영내용 : 내진보강 시설물 조세감면 지원(지방세특례제한법 제47조의4)

□ (신축시) 취득세 10%, 재산세 10%  5년간 감면

□ (대수선) 취득세 50%, 재산세 50%  5년간 감면     ※ 취득세 1회

○ 건축물 내진성능 자가점검 시스템 운영

- 운영목적 : 건축주 스스로 시스템 활용을 통하여 지진발생시 경각심 제고 및 소유 건축물에 대한 내진보강 유도

	건축물 내진성능 자가점검시스템
□ 배경 : 서울시에서 건축물 내진성능 향상방안 학술용역 일환으로 개발, ’12년도 시행 이후 연간 19,000건 이용 □ 목적 : 전문지식 없이도 소유 건축물의 내진성능을 개략적으로 판단할 수 있으며, 전문가의 상세진단 필요성 여부 등 지진대비 건축물 정보제공 □ 링크 : http://goodhousing.eseoul.go.kr/SeoulEqk/

- 운영방법 : 구 소식지, 홈페이지 등에 홍보배너(링크) 게시로 접근성 제고

2. 제도개선

○ 법령 제정 건의 및 인센티브 제도 확대 건의(⇒ 서울시, 국민안전처)

① 내진 보강비용 장기 저리융자 지원을 위한 법령 제정 건의(건축과)

② 지방세 감면비율 확대

□ (현 행) 신축 : 취득세 및 재산세 10% / 대수선 : 취득세 및 재산세 50%

□ (건 의) 신축 : 취득세 및 재산세 10%↑ / 대수선 : 취득세 및 재산세 50%↑

○ 민간건축물 지진안전성 인증제 시행

현재 공공건축물에 한하여 시행하고 있는「지진안전성 표시제」를 민간 건축물로 확대‧시행     ※ 공공건축물 : 15년 전면시행

- 시행시기 : '16. 하반기 홍보 후 점진적 확대시행

- 시행대상 : 내진성능 확보된 건축물

- 시행방법 : 건축 준공시 허가부서에서 신청서류 접수, 확인기관으로 제출

확인기관 (시 상황대응과)	⇆	경유기관 (자치구 준공허가부서)	⇆	신청자 (건축주)
□ 신청서류 검토 □ 안전성표시제 발급		□ 준공허가시 안내 □ 신청서류 접수, 제출		□ 신청서류 제출 □ 인증제 표시 부착

※ 제출서류 : 지진안전성표시제 신청서 1부, 구조안전 및 내진설계 확인서 1부

- 기대효과 : ‘지진에 안전한 건축물’이라는 긍정적 이미지 제공으로 건축주 내진보강 활성화 기대, 지진 발생시 대피 가능 공간 정보 제공

- 향후계획 : 민원인 불편 최소화를 위하여 서울시에 시온라인시스템 구축 건의

○ ‘건축물 내진성능 표시제’ 등 시행방안 건의(⇒ 서울시, 국민안전처)

건축물의 내진성능 여부를 건축물 대장에 기재함으로써 부동산 거래시 건축물 가치상승 기대 및 소비자의 알권리 충족

① 건축물 대장 등에 ‘내진설계(보강)’ 표기 및 부동산 포털에 안전등급 공개

② 건축물 재난보험요율 산정시 참고 및 부동산 거래시 가격 반영

2		체계적 예방·대비책 확대

□ 공공건축물 지진안전성표시제 활성화

○ 추진목적

- 지진에 안전한 건축물에 대한 시민 정보제공

- 건축물 이용자 안전 확보, 지진 발생시 대피 장소로 활용

○ 추진대상 : 우리 구에서 설치·운영하는 공공건축물

○ 추진절차

- 국민안전처 총괄, 해당 공공건축물의 차상급 행정기관에서 확인

총괄기관 (국민안전처)	⇆	확인기관 (시 상황대응과)	⇆	신청기관 (건축물 관리부서)
□ 지침 제정 □ 제도운영 총괄		□ 신청서류 검토 □ 표시제 확인서 교부(발급)		□ 신청서류 제출

- 제출서류 : 내진성능 평가기관에서 발급한 내진성능확인서 등

□ 내진성능 평가 시 : 내진성능평가 기관에서 발급한 내진성능평가서

□ 신축 시(2009.12.31.이후) : 구조안전 및 내진설계 확인서

□ 내진보강 시 : 내진보강완료 보고서

○ 향후계획

- 지진안전성표시제 홍보를 통한 신청 대상 확대 추진

- 지진대피 이재민 수용시설 지정 시「지진 안전 건축물」적극 활용

□ 지진대비 교육·훈련, 홍보강화

□ 지진재난 종합훈련 실시

○ 추진방향

- 지진 재난 발생시 관련부서 및 기관별 역할 숙지 및 협업 체계 강화

○ 훈련중점

- (시    민) 자율적 훈련참여를 통한 신속한 대피 등 행동요령 훈련

- (대응기관) 매뉴얼 숙달훈련, 상황근무자 초기대응 훈련 등 실시

○ 훈련유형

- 재난대응 안전한국훈련(매년 5월) : 재난안전대책본부 지원체계 가동훈련

- 학교, 유치원 등 교육훈련(연중) : 지진발생시 행동요령 등

○ 지진 대피훈련 실시

- 훈련일시 : ’16. 10. 19.(수)

- 훈련내용 : 지진 대피 훈련 (실내에 있는 시민은 책상·탁자 下 대피 후             야외대피장소로 이동) 및 지진행동요령 교육 실시

- 추진방법 : 10월 민방위 훈련과 연계하여 최근 발생된 지진 상황 가정             실제 지진대피 훈련 실시

○ 2017 지진방재 현장 종합훈련

- 추진시기 : ’17. 상반기

- 주관기관 : 중구청

- 참여기관 : 중부소방서, 남대문·중부경찰서, 전기·가스·통신 등 유관기관,   재난의료지원단, 자율방재단, 의용소방대, 민간 건설사 등

- 훈련내용 : 대규모 지진발생을 가상한 유관기관 현장 통합훈련

- 추진방법 : 별도계획 수립‧추진

□ 지진발생시 시민 행동요령 홍보

○ 시민행동요령 리플릿 제작 및 배포

- 제작기간 : '16. 11~12월

- 배포대상 : 구청, 각 동 주민센터, 복지시설 등

- 소요예산 : 1,000천원

○ 웹페이지 및 모바일, 소셜미디어, 우리구 소식지 등 홍보 등

- 홍보방법 : 웹페이지 및 SNS 환경에 맞는 지진안전 콘텐츠 게시

- 홍보내용 : 구민대피요령 등 정보제공

3		지진 대응·복구 체계 마련

□ 중구 지진피해 시설물 위험도 평가단 구성

○ 관련근거 : 서울특별시 중구 지진피해시설물 위험도 평가․관리에 관한 조례

※ 제정 2014.3.5., 개정 2015.12.23.

○ 제정목적 : 지진에 의한 시설물 피해가 발생한 경우 신속히 지진피해 시설물 위험도를 평가하여 추가 붕괴 등 2차 피해 방지 및 시민의 안전 확보

○ 구성방법

- 구성인원 : 최소 20명 (단장: 안전건설국장)

- 주요역할 : 구 재난안전대책본부에 두고 위험도 평가업무 지원 및 관리

- 자격요건 : 토목․건축, 안전관리 직무분야의 초급기술자 이상, 건축사 등

○ 향후계획 : ’16. 11~12월 평가단 구성, 지진발생 시 운영

□ 지진재난 현장조치 행동매뉴얼 정비 등 현행화

○ 주요내용

- 지진재난 발생 시 구 차원의 대응체계․절차 및 부서별 임무․역할과 협조체계 등을 규정

○ 향후계획

- 매년 현장조치 행동매뉴얼 보완 등 현행화 추진

□ CBS재난문자방송 가입 재난 예·경보 강화

○ 국민안전처 CBS재난문자방송 가입으로 예·경보 강화

○ 방재기관 상호간 정보 전달 경로 및 연락체계 구축

○ 통신네트워크, 행정전화 등 신속‧정확한 전달체계 강화

- CBS재난문자방송 (Cell Broadcasting Service) :

․  휴대폰에 특정 수신ID(채널)를 입력해 이동통신 기지국으로부터  데이터 정보를 수신 할 수 있도록 만든 대량 방송형 이동통신   기술로 재난발생지역내에 있는 모든 휴대폰 가입자에게 한번의  메시지전송으로 긴급 재난문자를 동시에 전달

○ 발송절차

① 재난상황 발생	② 정보수합	③ 재난문자 입력	④ 승 인	⑤ 문자송출	⑥ 문자확인
	안전치수과 등	재난총괄부서 (안전치수과)	국민안전처 (상활총괄담당관)	3개 통신사	우리구 지역내 핸드폰 가입자

□ 지진재난 대응체계 구축

□ 재난안전대책본부 가동

○ 가동시기 : 상황판단회의 후 피해정도에 따라 결정

- 규모 4.0~4.9 : 재난안전대책본부 필수요원 비상근무

- 규모 5.0 이상 : 재난안전대책본부 비상근무 실시

○ 지휘체계 및 임무

대책본부 실무반 반장

1단계

2단계

3단계

본부장

(구 청 장)

재난현장 통합지휘소

(대규모 피해시)

차장

(부구청장 )

총괄조정관

(행정관리국장)

행정지원

통제관

(안전건설국장 )

대외협력

담당관(안전치수과장)

재난수습

홍보

사회질서

대외협력

행정지원

자원봉사

상황관리

총괄반

긴급생활

안정지원

재난현장

환경정비

긴급통신

지원

시설응급

복구

에너지

기능복구

물자관리

자원지원

교 통

대 책

의 료

방 역

수색구조

구급

언론대응

보도지원

재난방송

시민소통

군·경찰

복구협력

행정지원 총괄

상황관리

상황전파

정보분석

피해조사

복구총괄

재난피해자

주거구호 등

생활안정

민간단체

구호지원

재난쓰레기 수거·처리

환경오염

조치

통신시설

복구

피해조사

및 조치

피해시설 등 조사 및

응급복구

가스,전기,

유류 등 피해시설

복구

재난현장

복구자원

지원

도로피해

조사복구

교통상황

파악전파

교통대책

재난지역

의료지원

방역대책

구조구급

재난경보

발령

복구지원

공보실장

중부·남대문경찰서

자

자치행정과장

안안

안전치수과장

복지지원과장

청소행정과장

전산정보과장

건축과장

환

환경과장

도로시설과장

교통행정과장

의약과장

중부소방서

공보실

안전치수과

자치행정과

3537부대

복지지원과

총무과

사회복지과

환경과

전산정보과

KT중앙지사

주택과

도로시설과

공원녹지과

YES’CO

한국가스

안전공사

한국전력

한국전기

안전공사

중부수도사업소

안전치수과

청소행정과

주차관리과

도로시설과

중부·남대문경찰서

서부도로사업소

건강도시과

건강관리과

위생과

안전치수과

□ 위기단계별 대응절차

□ 시민 대피 및 조기 안정화 대책

□ 시민 대피장소 지정(Open Space)

○ 대피장소 : 공원, 학교 운동장 등 지진피해가 적은 열린 공간

○ 지정현황 : 총 11개소, 수용인원 17,103명

합 계		운 동 장		공 원		기 타
개소	수용인원	개소	수용인원	개소	수용인원	개소	수용인원
11	17,103	9	14,252	2	2,851	-	-

□ 이재민 수용시설 지정·관리

○ 시설대상 : 공공건축물, 학교 등 쉽게 인지, 대피할 수 있는 장소

○ 지정현황 : 총 29개소, 수용가능 인원 16,612명

(수용면적 3.3㎡/1인 기준)

합 계		학 교		마을회관		경로당		관공서		기 타
개소	수용	개소	수용	개소	수용	개소	수용	개소	수용	개소	수용
29	16,612	7	11,775	2	575	9	527	3	272	8	3,463

□ 시민생활 조기안정화 대책

○ 교통 등 긴급 수송대책 【교통행정과】

- 우회도로 및 긴급 수송 동원차량 확보

- 교통정보관련 모니터링 및 정보제공

○ 청소, 분뇨처리 등 방역대책 【각 부서】

- 임시 적환장 설치(청소), 이재민 수용소 등에 간이 화장실 설치

- 전염병 예방을 위한 방역기동반 편성‧운영

- 재난현장 인근 병원 영안실 마련, 관계기관 신속한 검안절차 후 유족인계

○ 식용수 공급대책【각 부서】

- 이재민 수용시설, 수도시설 파괴지역에 아리수 공급(상수도사업본부)

- 수도시설 파괴 및 상수원 오염 대비 비상급수시설 사용(안전치수과)

※ 설치현황 : 3,323톤(공공 207, 민간 3,116), 약25ℓ/1인 용수공급

○ 도시기능 기반시설(Life-line) 긴급복구【각 부서】

- 전력, 통신시설(한전, KT 등 기반통신사업자)

∙ 이재민수용시설의 발전설비, 송‧변전설비 등 긴급복구 요청

∙ 구 종합상황실 전력, 통신설비 즉시 복구

∙ 피해지역 임시 공중전화 설치 및 위성 이용 주요 긴급통신회선 구성

- 도시가스공급시설 복구 및 필요시 피해 극심 지역의 가스차단(도시가스)

- 하수 및 치수시설 점검, 복구(안전치수과)

○ 경비‧방범활동 등 시민보호 및 질서유지【경찰서】

- 지진 공포에 의한 시민 패닉현상, 치안상태 악화에 따른 시민보호활동 전개

- 지진 피해지역 범죄예방 등 민생치안 활동 강화

○ 재해를 입은 이재민 등에 대한 구호 실시【복지지원과】

- (예방) 임시주거시설 지정, 재해구호물자 비축관리, 재난관리기금 활용

- (대응) 재해규모, 이재민 요구 등 고려한 임시주거시설 제공, 급식지원

- (복구) 신속한 재난지원금 및 의연금 지급, 재난취약기구에 대한 지원

Ⅳ		향후 추진일정

○ 공공시설물 내진보강대책 수립 -------------------------------------‘16. 10월

○ 제도개선 건의(인센티브 제도 확대 등) --------------------------‘16. 10월

○ 지진피해 시설물 위험도 평가단 구성 ----------------------------‘16. 11월

○ 홍보 리플릿 제작 배포 -----------------------------------------------‘16. 11월

Ⅴ		행정사항

□   지진방재 종합계획에 따른 후속조치 시행

○ 공공시설물 관리 주체(건축과, 도로시설과) 내진보강계획 수립·추진

○ 재난안전대책본부 실무부서는 13개 실무반별 임무 숙지 및 지진발생시 실무반별 역할 수행

○ 민간건축물에 대한 내진보강 활성화 방안 적극 추진

붙임 1. 공공시설물(특정관리대상시설) 내진설계 현황 1부.

2. 공공시설물(특정관리대상시설 외) 내진설계 현황 1부.

3. 지진대비 대피장소 지정 및 관리현황 1부.

4. 지진대비 임시주거시설 지정 및 관리현황 1부. 끝.

[붙임 1]

공공시설물(특정관리대상시설) 내진설계 현황

연번	시설명	연면적	지상/지하	준공년도	등급	내진설계 여부	관리부서	비고
1	중구보건소	3,896㎡	5/2층	1994년	A	◯	건강도시과
2	손기정기념관	1,600㎡	2/0층	1984년	B	×	문화관광과
3	중구종합사회복지센터	8,167㎡	12/3층	2000년	B	◯	복지지원과
4	신당종합사회복지관	2,925㎡	5/2층	1994년	A	◯	복지지원과
5	신당데이케어센터	1,139㎡	4/1층	1987년	B	×	사회복지과
6	중구청소년수련관	4,661㎡	3/2층	2001년	A	×	여성가족과
7	명동 주민센터	1,889㎡	5/3층	1994년	B	◯	자치행정과
8	회현동 주민센터	885㎡	3/1층	1985년	B	×	자치행정과
9	필동 주민센터	944㎡	3/1층	1991년	B	×	자치행정과
10	장충동 주민센터	848㎡	5/0층	1985년	B	×	자치행정과
11	을지로동 주민센터	1,256㎡	4/1층	1960년	B	×	자치행정과
12	신당동 주민센터	1,340㎡	5/1층	1989년	B	◯	자치행정과
13	다산동 주민센터	3,266㎡	3/2층	2007년	B	◯	자치행정과
14	약수동 주민센터	1,317㎡	4/1층	1988년	B	×	자치행정과
15	청구동 주민센터	787㎡	4/1층	1989년	B	×	자치행정과
16	신당5동 주민센터	2,718㎡	4/1층	1986년	B	×	자치행정과
17	황학동 주민센터	604㎡	5/1층	1970년	B	◯	자치행정과
18	소공동 주민센터	562㎡	4/1층	1971년	B	×	자치행정과
19	동화동주민센터	1,461㎡	5/1층	2005년	A	◯	자치행정과
20	광희동 주민센터	981㎡	5/1층	2006년	A	◯	자치행정과
21	구청사(본관)	20,744㎡	7/3층	1979년	C	×	총무과
22	구청사(별관)	2,954㎡	4/1층	1965년	C	×	총무과
23	구민회관	6,886㎡	4/1층	1991년	B	×	총무과
24	쁘렝땅 지하차도			1988년	B	×	도로시설과
25	서울역앞지하보도			1969년	B	×	도로시설과
26	서울역우체국앞지하보도			1967년	B	×	도로시설과
27	남산입구지하보도			1968년	B	×	도로시설과
28	남대문지하보도				C	×	도로시설과
29	덕수궁지하보도			1968년	B	×	도로시설과
30	한국은행앞지하보도			1966년	B	×	도로시설과
31	회현지하보도			1977년	B	×	도로시설과
32	충무지하보도			1985년	B	×	도로시설과
33	중앙우체국앞 지하보도			1966년	B	×	도로시설과
34	진양상가인공데크			1970년	D	×	도로시설과
35	신성상가인공데크			1968년	D	×	도로시설과
36	대림상가인공데크			1972년	D	×	도로시설과	서울시 보수·보강
37	청계상가인공데크			1971년	D	×	도로시설과	서울시 보수·보강
38	남산입구 보도육교			1997년	B	×	도로시설과	’17.4월 철거예정
39	충무초교앞보도육교			1979년	B	×	도로시설과
40	숭의,리라초교앞보도육교			2004년	A	×	도로시설과

[붙임 2]

공공시설물(특정관리대상시설 외) 내진설계 현황

연번	시 설 명	연면적	지상/지하	준공년도	내진설계 여부	관리부서
1	중림치안센터	184	2/0층	2001		재무과
2	구립도서관	966	3/1층	1991		문화관광과
3	중구 문화원	389	2/0층	1987		문화관광과
4	충무아트홀	36,726	6/4층	2005	○	문화관광과
5	남산타운 문화체육센터	1,851	5/2층	2010	○	교육체육과
6	회현체육센터	4829.24/527.4	5/2층,1/1충	2009		교육체육과
7	훈련원공원 종합체육관	2,467	2/2층	2014	○	교육체육과
8	신당구립도서관	1,557	4/1층	2010	○	문화관광과
9	서울상공회의소 중구상공회	944	6/1층	1968		시장경제과
10	자원봉사센터	446	3/1층	2010		복지지원과
11	중림복합시설	11,283	7/2층	2012	○	복지지원과
12	중구 보육정보센터 여성플라자	2,183	6/1층	2012		여성가족과
13	보훈회관	1,252	5/2층	2009	○	복지지원과
14	특수임무수행자회 중구지회사무실	94	2/0층	2001		복지지원과
15	남대문로5가 경로당	108	1/0층	1993		사회복지과
16	회현 경로당	287	2/1층	1997		사회복지과
17	명동 경로당	665	4/1층	1989		사회복지과
18	필동 경로당	571	5/1층	1997		사회복지과
19	장충 경로당	236	3/0층	1999		사회복지과
20	공원 장충경로당	426	2/0층	1999		사회복지과
21	묵정 경로당	195	5/2층	1992		사회복지과
22	을지 경로당	265	3/1층	1993		사회복지과
23	신당동 경로당	663	3/1층	2004		사회복지과
24	광희문 경로당	578	5/1층	1997		사회복지과
25	다산동 경로당	452	4/1층	2011	○	사회복지과
26	장수 경로당	444	3/1층	1997		사회복지과
27	충현 경로당	284	2/1층	1986		사회복지과
28	약수 경로당	234	2/1층	1992		사회복지과
29	동호 경로당	308	2/1층	2009		사회복지과
30	청구 노인복지센터	665	4/1층	2014	○	사회복지과
31	유락 경로당	142	2/0층	1963		사회복지과
32	유락 할머니경로당	112	2/1층	1993		사회복지과
연번	시 설 명	연면적	지상/지하	준공년도	내진설계 여부	관리부서
33	신당5동 경로당	204	3/1층	1995		사회복지과
34	신당5동 할머니경로당	116	2/1층	1998		사회복지과
35	황학 경로당	230	2/1층	1992		사회복지과
36	황중 경로당	257	3/1층	1996		사회복지과
37	중림 경로당	198	1/0층	1998		사회복지과
38	남산 실버복지센터	759	3/1층	1190		사회복지과
39	주간보호센터 남산골쉼터	408	3/1층	1978		사회복지과
40	약수 노인종합복지관	908	4/1층	1993		사회복지과
41	동화동 노인복지관	420	2/1층	1995		사회복지과
42	구립중구노인요양센터	1,655	3/3층	2012	○	사회복지과
43	중구청 직장어린이집	777	3/0층	2005		여성가족과
44	회현 어린이집	651	2/1층	1994		여성가족과
45	충무 어린이집	341	2/1층	1994		여성가족과
46	필동 어린이집	731	3/1층	2012		여성가족과
47	을지 어린이집	532	3/1층	1998		여성가족과
48	신당동 어린이집	934	4/1층	2016	○	여성가족과
49	남산숲 어린이집	599	1/1층	1987		여성가족과
50	약수 어린이집	751	3/1층	1993		여성가족과
51	청구 어린이집	1,032	2/2층	1993		여성가족과
52	신당5동 어린이집	853	2/1층	2003		여성가족과
53	동화나라 어린이집	1,099	2/1층	2006	○	여성가족과
54	황학 어린이집	639	3/1층	1991	○	여성가족과
55	황학어린이집(임시)	252	2/0층	2012	○	여성가족과
56	단우물 어린이집/공영주차장	5,049	5/4층	2015	○	주차관리과
57	중림 어린이집	518	3/1층	1998		여성가족과
58	자원재활용처리장	171	1/3층	1999		청소행정과
59	남대문시장 쓰레기적환장	448	0/1층	2010		청소행정과
60	환경미화원 휴게실	92	2/0층	1964		청소행정과
61	환경미화원 휴게실	1,267	4/0층	1960		청소행정과
62	환경미화원 휴게실	82	2/0층	1992		청소행정과
63	환경미화원 휴게실	97	2/0층	1965		청소행정과
64	환경미화원 휴게실	4,419	17/1층	1970		청소행정과
65	환경미화원 휴게실	944	6/1층	1968		청소행정과
66	환경미화원 휴게실	119	1/0층	1960		청소행정과
67	환경미화원 휴게실	116	2/0층	1966		청소행정과
68	광희동 공중화장실	119	2/0층	2000		청소행정과
연번	시 설 명	연면적	지상/지하	준공년도	내진설계 여부	관리부서
69	신당동 공중화장실	23	1/0층	1984		청소행정과
70	신당동 공중화장실	218	2/0층	1946		청소행정과
71	신당동 공중화장실	78	1/0층	2011		공원녹지과
72	필동 공영주차장	1,584	3/1층	2007	○	주차관리과
73	신당2동 공영주차장	3,290	1/2층	2007		주차관리과
74	초동 공영주차장	1,764	3/0층	1996		주차관리과
75	청구 공영주차장	2,141	4/0층	1997		주차관리과
76	성곽 공영주차장	1,460	4/0층	1999		주차관리과
77	신당사거리 공영주차장	2,656	3/1층	1974		주차관리과
78	충현 공영주차장	3,147	3/2층	2001		주차관리과
79	동화동 공영주차장	1,838	1/1층	2002		주차관리과
80	동산 공영주차장	3,489	3/0층	2002		주차관리과
81	손기정 체육공원주차장	6,877	4/1층	2002		주차관리과
82	서소문 공원지하주차장	37,270	1/4층	1997		주차관리과
83	약수(신당3동)공영주차장	4,013	3/1층	2005		주차관리과
84	무학봉근린공원 다목적체육관	791	1/1층	2005		주차관리과
85	장충공영주차장	4,638	4/1층	2005		주차관리과
86	다산아트 공영주차장	3,896	3/2층	2005	○	주차관리과
87	남산동 공영주차장	2,339	5/2층	2008	○	주차관리과
88	문화공영주차장	1,059		2005		주차관리과
89	버티공영주차장	2,971	2/1층	2004		주차관리과
90	빗물저류조(예장동 숭의초교뒤)	810	1/0층	2006	○	안전치수과
91	빗물저류조(필동 한옥마을내)	1,219	1/0층	2008	○	안전치수과
92	빗물저류조(필동 주민운동장)	970	1/0층	2010	○	안전치수과
93	빗물저류조(동국대 정문앞)	800	1/0층	2015	○	안전치수과

[붙임 3]

지진대비 대피장소 지정 및 관리현황

<대피장소 지정현황>

구 분	계		운동장		공원		기 타
	개소	수용	개소	수용	개소	수용	개소	수용
중구	11	17,103	9	14,252	2	2,851	-	-

<대피장소 관리현황>

구분	행정동	위 치 (도로명주소)	시설명	면적 (㎡)	수용 (명)	관리자 연락처
						성명	전화번호
	계		11개소	81,238	17,103
1	소공동	덕수궁길 140	덕수초등학교	1,000	303	한경옥	735-7225
2	명동	퇴계로 22길 17	남산초등학교	5,265	1,595	노재분	2097-9500
3	필동	소파로 2길 7	리라초등학교	3,035	919	권응팔	777-7462
4	장충동	퇴계로 50길 13	충무초등학교	6,250	1,893	홍경희	2279-0010
5	광희동	광희동 1가 242	쌍림어린이공원	1,490	451	김예림	3396-5855
6	신당동	을지로 299	한양공업고등학교	8,617	2,611	채성범	2238-5181
7	다산동	청구로 17길 40	장충초등학교	11,537	3,496	이은숙	2238-9091
8	청구동	다산로 170	청구초등학교	7,200	2,000	지화영	2252-1866
9	신당5동	퇴계로 90길 17	성동고등학교	3,162	958	신종현	2237-2412
10	동화동	청구로 6길 11	흥인초등학교	4,000	477	서효순	2235-4095
11	중림동	손기정로 101	손기정체육공원	29,682	2,400	박경진	3396-5862

[붙임 4]

지진대비 임시주거시설 지정 및 관리현황

< 임시주거시설 지정현황 >

(단위 : 명)

구 분	계		학 교		마을회관		경로당		관공서		기 타
	개소	수용	개소	수용	개소	수용	개소	수용	개소	수용	개소	수용
중구	29	16,612	7	11,775	2	575	9	527	3	272	8	3,463

< 임시주거시설 관리현황 >

구분	행정동	위 치 (도로명주소)	시설명	면적 (㎡)	수용 (명)	관리자 연락처
						성명	전화번호
	계		29개소	63,271.42	16,612
1	소공동	덕수궁길 140	덕수초등학교	1,000	303	한경옥	735-7225
2		남대문로1길 31-5	소공동주민센터 4층강당	135.54	50	유영숙	3396-6512
3	회현동	퇴계로12가길 23	회현어린이집	650	196	이수미	757-0896
4		퇴계로12길 89	회현경로당	103.55	80	안종수	755-7892
5	명동	퇴계로22길 17	남산초등학교	5,265	1,595	노재분	2097-9500
6		퇴계로20길 25-26	명동경로당	283.22	60	이정영	779-1950
7	필동	소파로2길 7	리라초등학교	3,035	919	권응팔	777-7462
8		필동로 11	필동경로당	571.14	53	김덕인	2273-0607
9	장충동	퇴계로50길 13	충무초등학교	6,250	1,893	홍경희	2279-0010
10		동호로25길 38	장충경로당	236	70	시덕수	2264-3678
11		동호로 257-10	공원장충경로당	425	120	곽태성	274-7814
12	광희동	을지로39길 40	구민회관	1,240	375	신민호	2280-8388
13		퇴계로 303-9	광희경로당	254.12	64	이응석	2275-4360
14	을지로동	을지로20길 24-10	을지로교회	858	200	안재평	2266-3070
15		을지로28길 16	을지경로당	112	50	김춘자	2274-7808
16	신당동	을지로 299	한양공업고등학교	8,617	2,611	채성범	2238-5181
17		다산로29길 10	신당경로당	176.75	10	방순숙	2234-5116
18	다산동	청구로17길 40	장충초등학교	11,537	3,496	이은숙	2238-9091
19		동호로12길 97	다산경로당	114	20	정영일	2238-3357
20	약수동	다산로6길 11	약수노인복지관	659	199	이금영	2234-3516
21		다산로8길 32	약수교회	643	195	박원빈	2238-3856
22	청구동	동호로10길 27	신일교회	5,028	1,523	배요한	2252-1155
23		다산로24가길 23	청구동문화마당	537.1	200	박지민	3396-6808
24	신당5동	퇴계로90길 17	성동고등학교	3,162	958	신종현	2237-2412
25		퇴계로 460	유락종합사회복지관	178	100	안승찬	2235-4000
26	동화동	퇴계로86길 96	문화교회교육관 지하	126	50	김형진	2234-7068
27		다산로36길 100	동화동주민센터 지하강당	391	100	서준범	3396-6874
28	황학동	난계로11길 52	황학동청사	402	122	유미경	3396-6902
29	중림동	서소문로6길 16	중림종합복지센터	11,282	1,000	서필원	2280-8448