문서번호	도시철도설비부-11369
결재일자	2016.10.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		송변전과장	도시철도설비부장
고명규		박동규	10/18 정찬웅
협 조	정보통신과장			代박규영
	신호과장			김영하
	전문관			조대근
	주무관			배종수
	주무관			김한수

『9호선 3단계 시스템분야 책임감리용역(2차)』

감리원 투입시기 조정에 따른 계약변경 시행 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

『9호선 3단계 시스템분야 책임감리용역(2차)』

감리원 투입시기 조정에 따른 계약변경 시행 보고

지하철 9호선 3단계 시스템분야 책임감리용역(2차) 수행중 감리원 투입시기 조정에 따른 계약변경 사항이 발생하여 아래와 같이 조치코자 함.

용역개요

○ 용 역 명 : 서울지하철9호선 연장건설(3단계) 시스템분야 전면책임감리용역

○ 과업위치 : 송파구 잠실운동장 ~ 올림픽공원 ~ 강동구 둔촌동(보훈병원 앞)

○ 과업범위 : 9호선 연장건설(3단계) 사업구간 시스템분야 책임감리

- 연  장 9.14km, 정거장 8개소(변전실 3개소)

○ 계약현황 : 세종기술(주) 외 2개사 공동수급(분담이행방식)

구 분	용 역 기 간	계 약 금 액	비 고
총 차	2015. 1. 5 ~ 2018. 12. 15	2,901,630천원
1 차	2015. 1. 5 ~ 2015. 12. 31	200,000천원	`15.12.31 준공
2 차	2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31	826,000천원	진 행 중

감리원 투입현황(`16.10.17 기준)

구 분			등 급		주 요 업 무	투입일자
			기 준	보 유
책 임 감 리 원			특 급	특 급	시스템분야 감리업무 총괄	`15. 9. 1
전 기	보 조 감리원	송변전	고 급	특 급	송변전공사 시공감리 총괄	`15. 9. 1
			중 급	특 급	송변전공사 시공감리	미 투 입
		전차선	고 급	특 급	전차선공사 시공감리 총괄	`15. 9. 1
			초 급	특 급	전차선공사 시공감리	미 투 입
	비상주감리원		고 급	특 급	기술검토 및 검사, 기타 현안사항 검토	`15. 9. 1
정 보 통 신	보조감리원		고 급	특 급	정보통신공사 시공감리 총괄	`15. 9. 1
			고 급	특 급	정보통신공사 시공감리	`16.10.4
			중 급	특 급	정보통신공사 시공감리	미 투 입
	비상주감리원		고 급	특 급	기술검토 및 검사, 기타 현안사항 검토	`15. 9. 1
신 호	보조감리원		고 급	특 급	신호공사 시공감리 총괄	`15.11.2
			고 급	특 급	신호공사 시공감리	미 투 입
			중 급	중 급	신호공사 시공감리	미 투 입
	비상주감리원		고 급	특 급	기술검토 및 검사, 기타 현안사항 검토	`15.11.2

변경사유

○ 통신 및 신호분야 보조감리원(3명) 투입시기 조정

구 분		조 정 전	조 정 후	비 고
통 신	고 급	2016. 4월	2016.10월	투입기간 6개월 감소
	중 급	2016. 5월	`17년 투입예정	투입기간 8개월 감소
신 호	중 급	2016. 6월	〃	투입기간 7개월 감소

○ 감리원 투입시기 조정에 따른 투입인원 변경(감 19.716인)

구 분	계	책임 감리	보 조 감 리				비 상 주 감 리
			소 계	전 기	통 신	신 호	소 계	전 기	통 신	신 호
변경전	88.658	14.882	65.730	22.448	26.306	16.976	8.046	3.728	2.626	1.692
변경후	68.942	14.882	47.805	22.448	14.133	11.224	6.255	3.728	1.409	1.118
증․감	-19.716	0	-17.925	0	-12.173	-5.752	-1.791	0	-1.217	-0.574

변경내용

○ 계약변경 현황

구 분		변 경 전	변 경 후	비 고
총 차	기 간	2015. 1. 5 ~ 2018.12.15	변경사항 없음
	금 액	2,901,630천원	〃
2 차	기 간	2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31	〃
	금 액	826,000천원	650,000천원	감 176,000천원

○ 2차 감리용역비 변경현황

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
직접인건비	283,462,233원	220,425,154원	- 63,037,079원
제경비	311,808,456원	242,467,669원	- 69,340,787원
기술료	119,054,137원	92,578,564원	- 26,475,573원
직접경비	31,458,215원	30,885,587원	- 5572,628원
계	745,783,041원	586,356,974원	- 159,426,067원
공급가액	745,780,000원	586,350,000원	- 159,430,000원
부가가치세	74,578,000원	58,635,000원	- 15,943,000원
손해보험료	5,642,000원	5,015,000원	- 627,000원
합 계	826,000,000원	650,000,000원	- 176,000,000원

- 감리원 투입인원 감소로 공급가액 159백만원 감액

- 부가가치세 및 손해보험료 17백만원 감액

조치계획

- 2차 감리용역은 용역기간 변경없이 계약금액만 변경하여 계약체결.

- 2차 감리용역에서 감액된 176백만원은 총차 용역금액 변경이 없도록

총차 감리원 투입계획 변경하여 3차 이후 용역계약에 반영.

- `16.12월중 3차 감리용역에 대한 계약체결.(`17.1.3 착수)

붙임 : 1. 변경전 책임감리용역(2차) 내역서 및 감리원 투입계획.  1부.

2. 변경후 책임감리용역(2차-1회) 내역서 및 감리원 투입계획 1부.  끝.