문서번호	주차계획과-14219
결재일자	2016.10.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주차시설팀장	주차계획과장
금종융		전태호	10/19 윤보영
협조

천호3동 주택가 공동주차장 건설

예산 재배정 검토

2016. 10.

도시교통본부

(주차계획과)

천호3동 주택가 주차장 건설 예산 재배정 검토

강동구에서 추진중인 『천호3동 주택가 공동주차장 건설사업』 관련 ‘16년 본예산 주차장 사업비(시비) 재배정 요청함에 따른 검토결과 보고

Ⅰ. 사업개요

○ 위    치 : 강동구 성안로31마길 3(천호동 174-1외 9필지)

○ 규    모 : 11,862백만원(주차장 8,808, 도서관 3,054)

- 주 차 장 : 199면 (지하3층~지상1층, 연면적 6,771㎡)

- 복합시설 : 도서관 (지상2층, 929㎡)

○ 총사업비 : 8,808백만원(시비 5,285, 구비 3,523)

- 시비 : ‘15년(명시이월):3,785백만원, ’16년(본예산):1,500백만원

○ 사업기간 : ‘14.10 ~ ‘17.6.

Ⅱ. 추진 경위(계획)

○ ‘14.3.28 : 천호3동 제2공영주차장 건설계획 수립

○  ‘14.8.27 : 시 투자심사

○  ‘15.6.17~’16.1.12 : 기본 및 실시설계 용역

○  ‘15.12.31 : 공사 발주

○  ‘16.2.28 : ’15사고이월 예산 재배정 (3,785백만원)

○  ‘16.3.9 : 주차장 운영,관리 협약 체결 협의 (시→구)

○  ‘16.3.16 : 협약서 내용중 소유권 관련 자치구 미동의

○  ‘16.4.28 : ’15사고이월 재배정 예산 중 10억 감배정

○  ‘16.8.22 : ’15사고이월 예산 재배정 (1,000백만원)

○  ‘16.9.5 : 2차공사 발주

Ⅲ. 세부 검토 내역

□ 천호3동 주택가 공동주차장 건설 예산 재배정 요청

- 관련공문 : 강동구 교통지도과-24415호 (‘16.10.12)

□ 주차장 분야별 사업비 (단위: 백만원)

구 분		사업비	시비	구비	발주시기	비고
계		8,808	5,285	3,523
설계용역	설계용역	461	277	184	‘15.12 완료
공사비	토목,건축	6,449	3869	2580	‘16.1~
	전 기	706	424	282	〃
	소방,전기	197	118	79	〃
	통 신	434	260	174	〃
	폐기물	59	35	24	〃
감리비	감리비	484	290	194	〃
부대비	시설부대비	18	11	7

□ 예산 재배정 검토

○ 사업비 배정현황 (시설비, 단위: 백만원)

구분	계	‘15년이전	‘16년(이월포함)			비고
			계	기배정	금회배정
계	8,808	3,523	5,285	3,785	1,500
시비	5,285	-	5,285	3,785	1,500
구비	3,523	3,523	-	-	-

□ 요청 사유

○ ‘17.6월 중 토목,건축 공사완료키 위해 잔여 시비예산 재배정 요청

□ 검토 의견

○ ‘15.12월말 공사발주 후 정상적으로 추진중(공정 40%)에 있어 원활한 사업추진을 위해 ’16본예산(15억) 재배정함이 타당하다고 판단됨

※ ‘16.10.19 시․구간 관리,운영 협약체결 완료

첨부   예산재배정 요청공문 1부.   끝.