문서번호	세무과-22422
결재일자	2016.10.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		세무정보화팀장	세무과장
박수임		안효무	10/19 김윤규
협조

2016년 세무종합시스템 운영 및 유지관리 부분준공(3차) 검사 결과 보고

2016. 10.

세 무 과

2016년 세무종합시스템 운영 및 유지관리

부분준공(3차) 검사 결과 보고

2016년 세무종합시스템 운영 및 유지관리 사업과 관련하여  부분준공(3차) 검사를 실시하고 결과를 보고 드림

유지보수 계약 개요

○ 계약건명 : 2016년도 세무종합시스템 운영 및 유지관리

○ 사 업 자 : ㈜씨와이디 정보기술

○ 계약방법 : 공개경쟁입찰/협상에 의한 계약

○ 기    간 : 2016.1.1.~2016.12.31

○ 금    액 : 1,250,000천원

○ 사업범위

- 응용프로그램 추가개발 및 기능개선

- 세무종합시스템 응용 및 시스템 소프트웨어 유지관리

- 지방세 부과·징수 처리 및 운영 지원

개발 및 유지보수 진척률

구 분	계 획	누적실적(금회)	진척률(%)
보완 개발	80건	58(25)건	72.5%
추가 개발	65건	33(12)건	50.8%
응용 프로그램 유지보수	-	1367(583)건	-

유지보수비 지급 내역

❍ 부분 준공 내역

구 분	세 부 내 용
기 간	2016. 7. 1. ~ 9.30.
금 액 292,766천원	① 추가 개발비(총 12본) : 28,479,556원 총 기능점수 : 67.2 ② 응용프로그램 유지보수비 : 241,782,422원 1개월당 단가 80,594,140원 * 3개월 ③ 시스템SW 유지보수비 : 22,504,250원 1개월당 단가 7,501,416원 * 3개월

※지급내역

구 분	계약금액	부분준공(1차)	부분준공(2차)	부분준공(3차)	잔 액
합 계	1,250,000천원	278,865천원	295,902천원	292,766천원	382,467천원
공공운영비	1,057,100천원	264,286천원	264,286천원	264,286천원	264,242천원
전산개발비	192,900천원	14,579천원	31,616천원	28,480천원	118,225천원

검사(수) 내역

❍ 검사대상 : 추가개발 프로그램, 응용 및 시스템SW 유지보수

❍ 검사방법

구 분	검사 방법	비 고
추가개발	개발 완료된 프로그램에 대해 유지보수업체에서 1차 검증 후 세목별 담당자 2차 검증 실시 사용자 추가 요구사항 반영 후 세목별 담당자의 승인으로 검사	기능점수 적용
응용프로그램 운영 및 유지보수		월별 단가 적용
시스템SW 유지보수	- SW 제조사별 정기점검 이행여부 검사	월별 단가 적용

개발 및 유지보수 추진 내역

❍ 추가 개발 내역(총12건)

연번	관리번호	내 역
1	SFR-003	(세정연감)최소납부세액 현황 신규서식 개발
2	SFR-014	(법인소득)연결법인 안분명세서 일괄등록(법인소득세)
3	SFR-036	(법인소득)법인별 대사처리 및 정산진행 상태 관리 기능
4	SFR-040	(담배소비세)반출정보 등록관리
5	SFR-044	(법인소득)법인지방소득세 본점 외 지점자료 및 오류통보자료 응답기능
6	SFR-045	(담배소비세)관세청 특별징수에 따른 징수내역 등록관리기능
7	SFR-046	(법인소득)첨부서류 공유전송(Wetax 연계추가)
8	SFR-047	(법인소득)첨부서류 공유현황 조회 및 내역 추가
9	SFR-048	(특별징수)비거주자 과세사실 증명서 개발
10	SFR-049	(종합소득)국세청 확정신고,기한후신고 통보자료 신규연계 기능
11	SFR-058	(자동차세)국가유공자정보관리 개선
12	SFR-062	(행정제재)공공기록정보 한국신용정보원(은행연합회) 연계 및 관리

❍ 보완 개발 내역(총25건)

연번	관리번호	내 역
1	MAR-001	(등록면허세(등록))등록면허세(등록분) 보완
2	MAR-006	(법인지방소득) 과세기관 오류 및 지점통보자료 연계등록
3	MAR-024	(주민세) ETAX신고분 비과세감면 과세자료 처리 개선
4	MAR-027	(부동산취득세) 수시분 공동주택 일괄과세 기능 구현
5	MAR-029	(부동산취득세) 주택외 건물 시가표준액 조회기능
6	MAR-031	(부동산취득세) ETAX 주소처리 방식 개선
7	MAR-034	(결재관리)결재 연계과정에서 오류시 담당자 직접취소기능 개선
8	MAR-035	(결재관리)결재 연계처리시 첨부파일명에도 결재번호 관리 추가
9	MAR-036	(결재관리)결재연계시 생성되는 본문 표출기능보완
10	MAR-039	(등록면허세(면허))등록면허세(면허) 일괄신고기능 구현

연번	관리번호	내 역
11	MAR-040	(국세청 과점주주)국세청과점주주현황 조회 개선
12	MAR-042	(법인세무) 법인균등할대장대사 법인대장 등록 기능 추가
13	MAR-044	(사용자등록관리)사용자등록관리 개선
14	MAR-048	(시스템)공지사항에 상시게시 tab을 분리하고, FAQ tab 신설
15	MAR-052	(지출예산)지출예산 결산대비 현년도 발생 매핑 코드등록 관리
16	MAR-054	(총괄과세)개인전용계좌 문자발송시 내용에 구청명+지방세 문구기재
17	MAR-056	(지방세환급)양도신청서 등록기능 추가
18	MAR-058	(38세무)일괄 압류/해제 개선(38세무)
19	MAR-060	(자동차세) 본청 일괄 작업 자동화
20	MAR-061	(법인소득)법인지방소득세 수정 및 경정결정분 신고납부 안내문(2종) 출력
21	MAR-062	(주민세)법균대장과 국세청자료 비교 정비 보완
22	MAR-064	(주민세)국세청 사업장대장 정보대사 기능 보완(주민세 정기분)
23	MAR-069	(부동산취득세) 이택스 신고분 납부전 삭제처리기능 추가
24	MAR-071	(법인세무)세무조사내역등록의 구제제도와 기타관리의 구제제도 연계 기능
25	MAR-072	(법인세무)세무조사내역등록의 포상금 지급내역을 상세관리할 수 있도록 개선

※ 추가 및 보완개발 상세내역 첨부 / 개발관련 산출물 형상관리 서버에 등록

❍ 상용 SW 정기(수시) 점검

- 연계솔루션, WAS, SSO, 문서보안, 형상관리, 시스템모니터링 등

- 분기점검 SW 제조사 정기점검 이행

❍ 월별 인력 투입현황

구분	7월	8월	9월	비고
투입공수(M/M)	12	12	12	특급 6, 고급 1 중급 2, 초급 3

첨부 : 부분준공 추진실적 1부. 끝.