투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시데이터센터
수신	서울시 서초구 방배로 134 동원빌딩 3층 중부건설(주) 귀중
(경유)
제목	데이터센터 옥상 방수공사 중지 통보

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀사와 2016. 9. 1일자 계약체결하여 시행 중인 「서울특별시데이터센터 옥상 방수공사」와 관련 아래와 같은 사유로 공사 중지를 통보하오니 지장물 처리 등 현장 내 안전조치를 제외한 일체의 공사를 중지하시기 바랍니다.

가. 공사중지 기간 : 2016. 10. 17. ~ 별도 공사 재기 통보 시 까지

나. 공사중지 사유 :「데이터센터 옥상 방수공사」간섭 공사인 태양광발전설비 설치 공사 기간 중 당해 공사 진행 불가.  끝.

	서울특별시데이터센터소장
주무관	김운기		기획관리과장	10/19 김안철
협조자
시행	기획관리과-10097	(		)	접수		(		)
우	06756	서울특별시 서초구 남부순환로340길 49	/	seoul.go.kr
전화	02-3470-1334	/전송	02-3470-1544	/	tkfkd01@seoul.go.kr	/	대시민공개